문서번호	도로시설과-18705
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전용도로팀장	도로시설과장
조현범		김준섭	10/24 이용심
협조

전용도로 일상유지보수예산 2차 배분계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

도 시 안 전 실

(도로시설과)

전용도로 일상유지보수예산 2차 배분계획

자동차전용도로 시설물의 신속한 보수․보강을 위한 “일상유지보수공사” 예산중 배정잔액에 대한 배분계획을 보고 드림

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 2014년 자동차전용도로 일상유지보수

○ 사업내용 : 자동차전용도로상 139개 시설물에 대한 긴급보수 및 일상정비

○ 예산액 : 4,063백만원

□ 예산집행 현황

○ 1차 배정 예산 집행 현황

(금액단위 : 백만원)

구분	시설개소	예산액	배정액	작업지시금액	집행율 (%)	집행잔액	배정잔액
계	139	4,063	3,663	3,039	83.0	624	400
동부	24		596	425	71.3	171
서부	21		873	810	92.8	63
남부	25		496	216	43.5	280
북부	21		580	569	98.1	11
성동	26		593	590	99.5	3
강서	22		525	429	81.7	96

□ 2차 배분 계획

○ 2차 배분 금액 : 400백만원

- 총 4,063백만원 중 1차 배정(3,66백만원) 후 잔액 400백만원

○ 배분기준 및 2차 배분 금액

- 배분기준 : 추가 사용 계획 및 1차분 집행잔액에 따라 배분

< 도로사업소별 추가 사용 계획 >

(금액단위 : 백만원)

구분	금액 (백만원)	추가 사용 계획	비고
동부	171	- 청담1교 단면부수 등 43백만원 - 구룡터널 신축이음 후타재 보수 등 55백만원 - 기타 균열보수 등 73백만원
서부	143	- 원효로 접속교 난간보수 등 33백만원 - 새남터다리 신축이음 보수 등 20백만원 - 봉원교 콘크리트 보수 등 76백만원 - 서빙고다리 단면보수 등 14백만원
남부	360	- 동작2교 교면포장 270백만원 - 여의상류 IC 교면포장 90백만원
북부	41	- 월릉하단IC 배수구 정비 11백만원 - 북부고가교 균열보수 등 30백만원
성동	103	- 중랑 동․서측 언더패스 방호울타리 보수 82백만원 - 정릉천고가 메쉬휀스 설치 등 21백만원
강서	206	- 여의하류IC 배수관정비 50백만원 - 오금교 동측지하차도 배수로정비 20백만원 - 경인철도 횡단지하차도 배면누수 보수 63백만원 - 염창IC 단면보수 등 55백만원 - 기타 받침 도장 등 18백만원

- 2차 배분 금액

(금액단위 : 백만원)

구분	계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
추가 사용 계획	1,024	171	143	360	41	103	206
집행 잔액	624	171	63	280	11	3	96
2차 배분 금액	400	-	80	80	30	100	110

□ 행정 사항

○ 예산 재배정 요청(예산담당관)

○ 예산 재배정 계획 통보(도로사업소).  끝.