문서번호	시설과-6336
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
이호식		김인규	10/24 이규상
협 조
	주무관			송병욱
	주무관			심찬석
	주무관			정연준
	주무관			문정주

『암사정수장 고도정수처리시설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과 보고

2014. 10. 24.

시 설 안 전 부

(시설과)

『암사정수장 고도정수처리시설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과 보고

암사정수장 고도정수처리시설공사의『조경 식재 및 시설물 계획 변경 실정보고』건에 대한 계약금액 변경이 있어, 계약금액조정 심사 소위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 공사기간 : 2009.10.07. ~ 2014.10.30

○ 사 업 비 : 1,658억원(도급비 623억원)

○ 공사개요 : 고도정수처리시설 110만톤/일

○ 시 공 사 : 고려개발(주)

○ 감 리 사 : 범한엔지니어링 외 1개사

소위원회 개최

○ 일    시 : 2014. 10. 23(목)

○ 심의안건 : 조경 식재 및 시설물 계획 변경 실정보고

○ 검 토 자 : 시설과장 5급 김인규 외 4명

계약금액 조정 근거

○ 공사계약일반조건 제19조의2항(설계서의 불분명, 누락, 오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)에 의거하여 설계변경 및 계약금액 조정 요청

계약금액 조정 내용

가. 공사비 증감 현황

(단위 : 천원)

심사요청			심사결과
당 초	변 경	증 감	심사대상	검 토	증 감
2,383,739	2,398,238	증) 14,499	2,398,238	2,391,297	감) 6,941

세부 검토내용

○ 환경이미지 및 고도처리부지 식재 보완과 환경교육마당/휨터 점토블럭 수량증가등 전반적인 시설계획 변경 협의

변경내용	○환경이미지 ㆍ잔디 4,498㎡ 증가, 파고라 삭제, 앉음벽 목재 보완 ㆍ부정형 판석 120㎡ 증가, 수목표찰 40개 증가 ○고도처리부지 ㆍ수목 수종변경(왕대등786주삭제,사철나무외 4,610주 추가) ㆍ줄떼 삭제 및 잔디 추가 (6,668㎡) ㆍ파고라 3개삭제, 장식가벽 삭제 ㆍ우수관99m 증가 ㆍ점토블럭 182 ㎡ 증가 등
공 종 별 수량검토	○ 변경내역 수량 검토 서양측백54주, 줄사철 100주는 시설물 배치 관계상 적절치 못하여 감조정 ( 감 6,941천원) ○ 단가 검토 - 증감된 공종수량은 기존계약단가적용 - 기타 신규공종은 신규단가 적용 : 원안통과
신규공종 및 증가된 물량	○ 신규 비목 : 협의율적용으로 적용품은 적정하여 원안통과
제 경 비 적 용	○ 적정 함

계약금액 조정 검토결과

○ 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등), 제19조의 2항(설계서의 불분명, 누락, 오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)에 의거하여 설계변경 조치 및 계약금액 조정이 타당함.

위 검토자 : 건설공사 계약금액조정 소위원회

팀장	시설과장	지방시설사무관	김 인 규
팀원	고도정수반	지방시설주사	심 찬 석
	고도정수반	지방시설주사	송 병 욱
	고도정수반	지방시설주사보	문 정 주
	시 설 과	지방시설주사보	정 연 준

붙 임 : 계약금액조정 내역서 1부. 끝.