문서번호	물관리정책과-16109
결재일자	2014.10.24.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물관리정책과장
양인혜	김기윤	10/24 배광환

2014년 토양오염실태조사

시료채취용역 설계변경

2014. 10. 24

도시안전실

(물관리정책관)

2014년 토양오염실태조사

시료채취용역 설계변경

2014년 토양오염실태조사 시료채취 용역 중 여건변화 및 안양천 퇴적토 오염조사 시료채취 등 과업변경으로 설계변경 시행하고자 함

용역 개요

❍ 용 역 명 : 2014년 토양오염실태조사 시료채취 용역

❍ 계 약 자 : 전남대학교 산학협력단외 1개사

❍ 계약기간 : ‘14.6.16 ~ 10.31

❍ 계약금액 : 88,341,800원

❍ 주요과업 : 시료채취, GPS측정, 시료채취공 원상복구

변경 내용

❍ 변경 근거

- 대상지역 조정(감) 보고     (물관리정책과-16072, ’14.10.24)

- 안양천 퇴적토 오염조사 계획(물관리정책과-15403, ‘14.10.13)

❍ 주요 변경내용

- 시료 굴착공 조정 : 14공 감(448공→434공)

- 복구 물량 조정   : 14개 감(448개→434개)

- 시료 채취수 조정 : 15개 감(482개→467개)

구 분	차 이	변경전 (실태조사)	변경후
			소계	실태조사	안양천
굴착공	14공	448공	434공	418공	16공
시료채취	15개	482개	467개	451개	16개

❍ 계약금액 변경 : 감 2,426,300원(88,341,800원→85,915,500원)

구 분	당 초	변 경	증·감
계	88,341,800원	85,915,500원	△2,426,300원
실태조사 시료채취	50,621,453원	49,041,329원	△1,580,124원
GPS측정조사 및 자료처리	15,916,992원	15,419,586원	△497,406원
시료채취공 원상복구	5,313,030원	5,185,070원	△127,960원
제경비 등 (부가세 포함)	16,490,325원	16,269,515원	△220,810원

행정 사항

❍ 설계변경 내용 반영하여 계약변경하고, 준공처리

❍ 시료분석은 ’14.12.31까지 보건환경연구원에서 시행

붙임 : 용역비 산출내역서(전·후) 각1부.  끝.