투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(1회)시행_2014년 포장공사구간 노면표시 설치공사

우리사업소에서 시행중인 『2014년 포장공사구간 노면표시 설치공사』 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 포장공사구간 노면표시 설치공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 5. 9 ~ 2015. 2. 28.

다. 도 급 자 : 태경건설  대표 정태영

라. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	458,594,400	674,192,000	증 215,597,600
도 급 비	231,529,400	365,695,000	증 134,165,600
관 급 비	227,065,000	308,497,000	증 81,432,000

마. 변경사유 : 포장공사 추가시행에 따른 도색 공사 물량 증가 및 작업지시에 따른 물량 증․감 발생

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 설계변경(1차) 내역서 1부.

2. 설계변경 방침서 1부.  끝.

주무관	조경현		도로보수과장	김승태		남부도로사업소장	10/24 代송재우
협조자	주무관	정규용		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-5855	(		)	접수		(		)
우	150-073	서울 영등포구 대림3동 도림로 145	/	www.seoul.go.kr
전화	3284-5451	/전송	842-1634	/		/	대시민공개