문서번호	시설과-6329
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
이호식		김인규	10/24 이규상
협 조
	주무관			송병욱
	주무관			심찬석
	주무관			문정주
	주무관			정연준

『암사정수장 고도정수처리시설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과 보고

2014. 10. 24.

시 설 안 전 부

(시설과)

『암사정수장 고도정수처리시설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과 보고

암사정수장 고도정수처리시설공사의 『신축이음부 마감 덮개 설치 실정보고』건에 대한 계약금액 변경이 있어, 계약금액조정 심사 소위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 공사기간 : 2009.10.07. ~ 2014.10.30

○ 사 업 비 : 1,658억원(도급비 623억원)

○ 공사개요 : 고도정수처리시설 110만톤/일

○ 시 공 사 : 고려개발(주)

○ 감 리 사 : 범한엔지니어링 외 1개사

소위원회 개최

○ 일    시 : 2014. 10. 23(목)

○ 심의안건 : 구조물 신축이음부 마감덮개 설치

○ 검 토 자 : 시설과장 5급 김인규 외 4명

계약금액 조정 근거

○ 공사계약일반조건 제19조의2항(설계서의 불분명, 누락, 오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)에 의거하여 설계변경 및 계약금액 조정 요청

계약금액 조정 내용

가. 공사비 증감 현황

(단위 : 천원)

심사요청(천원)			심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감	심사대상	검 토	증 감
-	17,450	증)17,450	17,450	16,270	감) 1,180

세부 검토내용

변경내용	○벽체,천정 : STS 304(t=1mm) 철판덮개 설치 ○바닥 : STS 304(t=3mm) 철판덮개 설치
공 종 별 수량검토	○ 변경내역 수량 검토 (적정) -벽체,천정 : 246m , 바닥 : 60 m ○ 단가 검토 - STS 강판 단가조정 (물가자료 단가적용) : ㆍSTS304, t=1.0mm : 당초 4197원/KG, 조정 3650원/KG ㆍSTS304, t=3.0mm : 당초 4551원/KG, 조정 3500원/KG
신규공종 및 증가된 물량	○ 신규 비목 : 잡철물제작설치 : 적정
제 경 비 적 용	○ 적정 함
○ 관급자재정산 및 국민건강 ․ 연금보험료 등 기타 정산이 필요한 항목은 최종 설계변경시 정산자료를 제출받아 정산처리 하기 바람.
○ 검토결과를 설계도서에 반영하여 시행토록 통보

계약금액 조정 검토결과

○ 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등), 제19조의 2항(설계서의 불분명, 누락, 오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)에 의거하여 설계변경 조치 및 계약금액 조정이 타당함.

위 검토자 : 건설공사 계약금액조정 소위원회

팀장	시설과장	지방시설사무관	김 인 규
팀원	고도정수반	지방시설주사	심 찬 석
	고도정수반	지방시설주사	송 병 욱
	고도정수반	지방시설주사보	문 정 주
	시 설 과	지방시설주사보	정 연 준

붙 임 : 계약금액조정 내역서 1부. 끝.