투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	대양건설 대표이사 최석환
(경유)
제목	서울시 감사결과에 따른 재시공 요청 및 환수 예고 안내

1. 서울시정에 협조해 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리사업소간 계약체결하여 시행 완료한 『2013년 자동차전용도로 일상유지보수공사』에 대하여 아래와 같이 서울시 감사결과가 통보되었기에 조속한 시일내 관련절차에 따라 재시공 및 환수조치 시행할 예정임을 알려드리오며, 별도 의견이 있을시 2014.10.30.까지 우리사업소(교량보수과)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 감사결과 처분요구 내역

■ 일원지하차도 일상유지보수공사 시공 부적정 ⇒ 재시공 조치

공 종	규 격	위 치	단위	재시공 물량	비 고
균열보수	에폭시 주입보수 (CW=0.5mm, T=150mm)	옹벽, 본선 벽체	m	200	부적정 시공
타일붙임	100×200×10mm	옹벽, 본선 벽체	㎡	7.9	부족 시공

■ 국민건강보험료 등 과다 지급 ⇒ 환수 조치                 (단위:원)

공 사 명	보험료 준공금①	보험료 재산정②	차 액③ (①-②)	제경비④	환수금액 (③+④)
2013년 자동차전용도로 일상유지보수공사	4,350,530	3,012,430	1,338,100	461,158	1,799,258

■ 내곡IC교 공사비 과다지급 ⇒ 환수 조치                   (단위:원)

구 분	규 격	수량	단위	단가(원)	공사비(원)	환수금액
계약내역	균열폭=0.5mm 균열깊이 T=150mm	193	m	25,933	6,873,000	2,489,000
실제시공	균열폭=0.3mm 균열깊이 T=100mm	193	m	14,677	4,384,000

끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	배상현		교량보수과장	10/24 김환겸
협조자	주무관	조장호
시행	교량보수과-4057	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 대치동 2번지	/
전화	02-2040-0384	/전송	02-2040-0308	/	yamato78@seoul.go.kr	/	대시민공개