함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	행정관리과장
(경유)
제 목	변경 계약의뢰(침전지 전단 정류벽외 1개소 벽면보수공사)

1. 우리 정수센터에서 시행중인 『침전지 전단 정류벽외 1개소 벽면보수공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 변경계약을 의뢰하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사명 : 침전지 전단 정류벽외 1개소 벽면보수공사

나. 도급자 : 홍용종합건설 주식회사 대표 이춘택

다. 공사기간 : 2014.4.28. ~ 2014.10.24

라. 설계변경사유 : 계약물량 증․감 및 보험료 정산에 따른 변경

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

바. 설계변경 금액

단위 : 원

구 분	계약금액		증·감
	당초	변경
도 급 비	76,020,200	81,620,000	증5,599,800

붙 임 : 1. 내부품의서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	정수시설과장
주무관	박광수		정수시설과장	10/24 박심근
협조자
시행	정수시설과-2593	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571(구의동)	/
전화	02-3146-5480	/전송	02-3146-5409	/	mylu81@seoul.go.kr	/	대시민공개