과 장			10/24 김종대	심사자		代김근섭	설계자	김근섭		설 계	심 사		결 재
										2014 년10월 일	2014년10월 일
변 경 설 계 서(제1회)
	용역명 : 2014 도로시설물 보수공사 건설폐기물 처리용역(성동)- 설계변경(제1회)
	구 분				당초금액(원)				변경금액(원)			비 고(증감)
	총 용 역 비				30,156,000				70,480,000			증)40,324,000
	도급비	계			30,156,000				70,480,000			증)40,324,000
		공급가액			27,414,546				64,072,728
		부가세			2,741,454				6,407,272
용역개요 : 당초- 폐콘크리트 181m3 435톤, 폐아스콘 1,130m3 2,655톤 변경- 폐콘크리트 145m3 333톤, 폐아스콘 1,514m3 3,548톤