문서번호	기전설비2과-4420
결재일자	2014.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전설비2과장	시설부장	한강사업본부장
박중모	신용철	차광재	10/27 한국영
협 조
	녹지관리과장		김영준
	공원사업과장		한흥태
	시설관리과장		박희철
	기전설비1과장		김남수
	주무관		이창훈
	주무관		곽영만

- 망원 초록길 조성공사 -

시설물 인계·인수 계획

2014. 10.

한강사업본부

(시  설  부)

- 망원 초록길 조성공사 -

시설물 인계 · 인수 계획

「망원 초록길 조성공사」가 완료됨에 따라 각종 시설물에 대한 관리기관(부서)의 사전․합동점검결과 지적사항을 조치 완료하고, 시설물별 인계하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 망원 초록길 조성공사

❍ 위    치 : 마포구 망원동 222번지일대(강변북로, 망원한강공원)

❍ 도 급 비 : 27,816백만원

❍ 공사기간 : 2010. 01. 06 ~ 2014. 10. 14

❍ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링외 1개사

❍ 시 공 사 : 통일건설(주)외 3개사

Ⅱ		추진현황

2012. 03. ~ 05. : 지하차도(1단계 : 일산방향) 합동점검 결과조치

∙ 도로시설과, 도로시설관리과, 교통운영과, 서울시설공단, 마포구청

2013. 03. ~ 05. : 지하차도(2단계 : 중앙분리대) 합동점검 결과조치

∙ 도로시설과, 교통운영과, 서울시설공단

2014. 04. ~ 05. : 지하차도(3단계 : 구리방향) 합동점검 결과조치

∙ 도로시설과, 교통운영과, 서울시설공단, 마포구청

2014. 05. ~ 07. : 예비준공검사 결과조치

2014. 07. 10 : 강변북로 지하차도 인계관련 회의개최

∙ 도로시설과, 서울시설공단, 마포구청, 한강사업본부, 감리사

2014. 07. ~ 08. : 시설물 인수․인계관련 사전점검 결과조치

∙ 한강사업본부(공원사업과, 녹지관리과, 시설관리과)

∙ 마포구청(공원녹지과, 문화관광과), 서부도로사업소

2014. 09. ~ 10. : 마포구청 건의사항 조치

Ⅲ		시설별 인계기관

내 부

관리부서	시설별	위 치	주요시설내용
○시설관리과	자연형 호 안	저수호안	○호안(연장 360m) - 사석 : 5,450㎥ - 전망데크 : 1개소
	초록길	초록길조성지역 (상부공원포함)	○토목시설 - 자전거도로 : 2,380㎡ - 마사토포장 : 2,160㎡ - 화강석판석포장 : 1,540㎡ - 휴게시설(나들목) : 1개소 - 배수시설(200mm) : 630m
	수상택시 승 강 장	저수호안 및 하상	○토목시설 - 출입로(목재데크) : 57㎡
	한강진출 도로(램프)	망원나들목옆	○토목시설 - 진출로 : 폭 3m, 연장 158m - 회전교차로 : 1개소

관리부서	시설별	위 치	주요시설내용
○녹지관리과	자연형 호 안	저수호안	○조경시설 - 식생매트 : 3,450㎡ - 물억새 : 41,460본 - 원두막 : 1개소
	초록길	초록길조성지역 (상부공원포함)	○조경시설 - 음 수 전 : 1개소 - 원 두 막 : 2개소 - 관수시설(50mm) : 940m ○수목식재 - 상록교목 : 소나무 152주 - 낙엽교목 : 왕벚나무 등 374주 - 상록관목 : 사철나무 등 2,850주 - 낙엽관목 : 영산홍 등 29,680주
	한강진출 도로(램프)	망원나들목옆	○수목식재 - 회양목 등 1,820주
○공원사업과	수상택시 승 강 장	저수호안	○수상택시승강장(1개소) - 스틸폰툰 : 48㎡ - 보조폰툰 : 17㎡ - 도 교 : 24㎡

외  부

관리부서	시설별	위 치	주요시설내용
○마포구청 토목과	회전교차로 및 보도	망원2빗물펌프장앞	○도로시설 - 회전교차로 : 1개소 - 사고석포장 : 419㎡ - 점토블록포장 : 539㎡

관리부서	시설별	위 치	주요시설내용
○마포구청 공원녹지과	망원정 마 당	망원정 마당 (구 벽돌공장)	○공원조성면적 : 3,160㎡ - 생태포장 : 930㎡ - 물길(화강석) : 1개소 - 휴게시설(파고라) : 1개소 - 배수시설(200mm) : 160m - 관수시설(50mm) : 220m - 음 수 전 : 1개소 - 망원정연결로(목재데크) : 91m ○수목식재 - 상록교목 : 소나무 115주 - 낙엽교목 : 느릅나무 등 283주 - 상록관목 : 눈주목 등 2,130주 - 낙엽관목 : 화살나무 등 9,590주 ○전기시설 - 공원등(LED 150W) : 3본 - 바닥매입등(LED 12W) : 18등 - 태양광 매입등(LED 1W) : 20등
	회전교차로	망원2빗물 펌프장앞	○수목식재 - 회전교차로 느티나무 1주
	공원복구	가설보도육교 철거지역	○수목식재 - 서양측백 등 2,241주
○마포구청 치수과	수 문	한강제방 (제내지)	○ 망원2수문구조물 - 3m x 2.1m x 4련 ○ 자동제어시스템 1식 - 광 LINK 및 단자함 : 1식 - 초음파 수위계 : 1세트 ○ 수문제어반 : 1면
○마포구청 문화관광과	망원정 협 문	망원정	○망원정 협문 등 - 협문 : 1개소 - 철평석 포장 : 46㎡ - CCTV : 1개소

관리부서	시설별	위 치	주요시설내용
○서부도로사업소 교량보수과	지하차도	강변북로	○지하차도 구조물 - 철근콘크리트구조 - 폭 55m, 연장 50m, 높이 5m
○서울시설공단 도로관리처	도로시설 가로등	강변북로 (지하차도 신설구간)	○도로시설 - 옹벽(U-TYPE) : 165m - 옹벽(L형) : 135m - 지하차도포장 : 18,270㎡ - 교통표지판 : 14개 - 가드레일 : 622경간 - 투명방음벽(h=2m) : 55경간 ○전기시설 - 지하차도 수배전반 : 8면 - 지하차도 등기구 · 세라믹메탈 CDM 150W : 54개 · 세라믹메탈 CDM 150W : 118개 - 지하차도 소화기함 : 9개 - 지하차도 CCTV : 8대 - 가로등(10m 350W) : 24본 - 가로등(12m 350W) : 6본
○서울시설공단 도로환경처	가로수	강변북로 (중앙분리대 및 도로변)	○가로수 - 이팝나무 등 209주

Ⅳ		인계·인수서류

❍ 망원초록길 인계·인수 목록

❍ 준공도면

❍ 관련시설 구조검토서 및 계산서

❍ 관련시설 유지관리지침서

❍ 시설별 하자담보책임기간

(※ 한강사업본부 조경분야 - 하자관리 : 시공부서, 유지관리 : 인수부서)

Ⅴ		조치계획

❍ 상기 인계·인수 계획과 같이 망원초록길 조성공사의 시설물 및 공사 준공도면, 유지관리지침서 등을 관련기관(부서)에 인계하고자 함.

첨 부 : 1. 하자담보 책임기간 산출내역서 및 보증서 각 1부.

2. 지하차도 인계 시청 관련부서 의견 1부.

3. 전기시설 인계시 조치사항 1부.  끝.