다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	마포자원회수시설 운영소장
(경유)
제목	2014년 마포자원회수시설 하반기 소정비 계획 변경 승인 통보

1. 마자운영 14-296(2014.10.24.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 마포자원회수시설 2014년 하반기 소정비 계획 일정 변경건에 대해 아래와 같이 승인하오니 정비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 소정비 주요내용 : 소각로 화격자 등 교체, 보일러 부대설비 세정 등

나. 정비일정 변경 : 2014.10.27. ~ 11.30(33일)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
1호기 정비 2호기 정비 3호기 정비	11.10 ~ 11.19(10일) 11.21 ~ 11.30(10일) 12.02 ~ 12.11(10일)	11.21 ~ 11.30(10일) 11.10 ~ 11.19(10일) 10.27 ~ 11.05(10일)	정비 일정·순서 변경 - 당초 : 1→2→3 - 변경 : 3→2→1
폐기물 반입정지	12.04 ~ 12.06(3일)	11.17 ~ 11.19(3일)	수도권 매립지 처리
소각로 가동	11.19 #1-14:00 11.30 #2-14:00 12.11 #3-14:00	11.30 #1-14:00 11.19 #2-14:00 11.05 #3-14:00	승온(보조버너 점화) 〃 〃

다. 소요예산 : 371,7325천원

라. 정비내역 : 연가단가 5건, 외주공사 1건

마. 승인조건

- 공사(안전, 품질, 공정 등) 및 폐기물 관리 철저

- 자체심사 대상 사업 승인 조건 이행 철저

- 소정비 종료 후 20일 이내 실적 보고

첨부 : 마포자원회수시설 2014년 하반기 소정비 계획 일정 변경 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	유영춘		자원회수시설팀장	정연구		자원순환과장	10/27 최홍식
협조자
시행	자원순환과-16375	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 12층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3681	/전송	02-2133-1026	/		/	대시민공개