문서번호	도로보수과-9585
결재일자	2014.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		10/27 이규철
협 조
	주무관		이상하

2014년 특별교통안전진단

교통소통개선사업 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
교통운영과-18498				32,378천원

2014.  10. 24(금)

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 특별교통안전진단

교통소통개선사업 시행계획 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2014년 교통소통 개선사업(특별교통안전진단)

○ 위    치 : 서대문구 성산로 금화터널 앞

○ 개선내용 : 제한속도 하향조정에 따른 노면표시 개선, 갈매기표지 설치, 도로표지병 설치, 충격흡수시설 설치

○ 예산배정 : 32,378,760원

□ 공사내역

○ 교통운영과-18498(2014.10.06.)호 『금화터널 주변 교통안전시설물 개선공사 협조요청 및 예산 재배정』에 대하여 개선사업 시행

- 재배정금액                    : 24,638천원

- 노면표시 개선(도색 및 제거)   : 6,674m

- 갈매기표지 및 도로표지병 설치 :   122개

- 충격흡수시설 설치             :      1개

○ 교통운영과-4327(2014.03.06.)호 『교통사망사고 지점 시설개선 예산 재배정(금화터널 앞)』예산 중 집행잔액 7,740,760원 사용.

□ 조치계획

○ 2014년 교통사고 잦은곳 개선사업 공사시행 요청으로 기 배정된 예산을『교통안전시설(노면표시) 유지보수공사』에 포함하여 시행하고자 함.

- 필요금액 : 약 26,503,760원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 도급 공종 및 물량 : 7,050m, 약 17,529,360원

▸ 백색 수동식 도색 : 1,547m,  재도색 : 2,547m

▸ 황색 수동식 도색 :   391m,  재도색 : 1,550m

▸ 노면표시    제거 : 1,015m

- 관급(특수페인트) 백색(R5), 황색(R4, R3) : 약 8,974,400원

○ 2014년 교통사고 잦은곳 개선사업 공사시행 요청으로 기 배정된 예산을『교통안전(도로)부속물 유지보수공사』에 포함하여 시행코자 함.

- 필요금액 : 약 5,875,000원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 도급 공종 및 물량 : 약 2,557,000원

▸ 갈매기표지 설치 :   10개소

▸ 도로표지병 설치 :  112개

- 충격흡수시설 관급구매(현장설치도) : 3,318,000원(수수료 포함)

○ 사업비 집행 현황

(단위 : 천원)

사업명	예산배정액	기 집행액	노면표시 (관급포함)	교통부속물 (관급포함)	집행잔액
교통소통 개선사업	72,173	39,794	26,504	5,875	0

□ 향후계획

○ 2014. 10. 27 : 교통안전시설(노면표시) 도색공사 작업지시

○ 2014. 10. 27 : 교통안전부속물 유지보수공사 작업지시

○ 2014. 10. 28 : 관급자재 구매 의뢰

○ 2014. 11. 30 : 공사완료 및 개선결과 보고(교통운영과)

붙 임 : 1. 설계내역서 및 수량산출서 각 1부

2. 설계도면 1부.  끝.