문서번호	생태공원과-2457
결재일자	2014.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
서은교		최병언	10/27 차광재
협 조
	주무관			양순옥

『양화 친수공간 조성공사 건설폐기물처리용역(1차)』

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

한강사업본부

(생태공원과)

『양화 친수공간 조성공사 건설폐기물처리용역(1차)』

준공기한 연기 검토 보고

현재 시행중인『양화 친수공간 조성공사 건설폐기물처리용역(1차)』은 주공정인 토목공사 준공기한 연기에 따라 부대공정인 건설폐기물처리용역의 준공기한 연기 검토 보고임.

※ 생태공원과-2200(2014.9.25.)

토목공사 개요

공 사 명 : 양화 한강공원 친수공간 조성공사(1차)

공사개요 : 면적 28,000㎡, 연장 0.27㎞

공사기간 : 1차(총차) 2013.12.27 ~ 2014.12.26.(기시행)

도 급 비 : 2,575,760천원

도 급 자 : 태흥개발(주) 대표자 신현종, 정나라건설(주) 대표자 이완규

건설폐기물용역 개요

용 역 명 : 양화 친수공간 조성공사 건설폐기물처리용역(1차)

용역개요 : 폐기물운반 1,942㎥(총차 2,786㎥)

폐기물처리 4,456ton(총차 6,475ton)

용역기간 : 1차 2014.1.3 ~ 2014.10.29.(총차 2014.1.3 ~ 2015.1.2)

용 역 비 : 102,842천원

용 역 자 : (유)도성개발 대표자 윤칠중

감 독 청 : 서울시시설관리공단

준공기한 연기

용역기간

- 당  초 : 2014.1.3 ~ 2014.10.29

- 변  경 : 2014.1.3 ~ 2015.1.2

연기사유

- 주공정인 토목공사 준공기한 연기에 따른 부대공정인 건설폐기물처리용역의 기간연장 불가피

귀책소재 및 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과

조치의견

위와 같이 준공기한을 연기하여 건설폐기물처리용역 추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 주공정 준공기한 연기 검토보고서 1부. 끝.