투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사 변경 승인(제2롯데월드 외곽 도로 조성공사)

1.  CPC토토목2제14-215(2014.10.23.)호와 관련입니다.

2.  귀 사에서 시행하고 있는『제2롯데월드 외곽 도로 조성공사 교통안전시설물(노면표시) 설치공사』 원인자부담공사와 관련하여 다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니

3. 원인자는 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 시방서』에 의거 공사사행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 제2롯데월드 외곽 도로 조성공사 교통안전시설물(노면표시) 설치공사

나. 공사위치 : 제2롯데월드 주변도로(올림픽로, 송파대로, 잠실로)

다. 변경사항

공사명	구분	설계	감리	시공사	원인자	공사기간 변경
						당초	변경
제2롯데월드 외곽 도로 조성공사 교통안전시설물(노면표시) 설치공사	노면표시	㈜트래픽스	㈜트래픽스	신한개발(주) 초승안전(주)	롯데물산(주) 롯데쇼핑(주) ㈜롯데호텔	2014. 6. 10 ~ 2014. 6. 30	2014. 6. 10 ~ 2014. 11.30

라. 변경사유 : 교통운영체계개선(TSM) 관련 서울시 요청사항 반영.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	롯데물산(주),롯데쇼핑(주),(주)호텔롯데,서울송파경찰서장(교통과장),송파구청장(녹색교통과장)
주무관	김종섭		주무관	박일연		도로보수과장	전결 10/27 代박일연
협조자
시행	도로보수과-6245	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0352	/전송	02-2040-0307	/	resta2002@seoul.go.kr	/	대시민공개