문서번호	공간정보담당관-11161
결재일자	2014.10.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보운영팀장	공간정보담당관
장인호		김연섭	10/27 代박대군
협조

「지하시설물통합정보시스템 기능개선 사업」

주간 보고 (10월3~4주)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

공간정보담당관

(공간정보운영팀)

□지하시설물통합정보시스템 기능개선 사업□

주간 보고 (10월3~4주)

-  -

사 업 명	지하시설물통합정보시스템 기능개선 사업
사업기간	2014.5.9. ~ 2014.11.3.	사 업 자	㈜지노시스템 컨소시엄
사 업 비	96,120천원	사 업 PM	㈜지노시스템 ******
주요내용	○ SDW 연계를 통한 시추공 정보 추가 검토 ○ 완료보고회 일정 확정 : ’14.10.29(수) 10:00 ○ 시스템 개발 완료

진행단계	개발 단계		전체 진척율	93.0%
업무구분	실적(2014.10.09 ~ 2014.10.22)		계획(2014.10.23 ~ 2014.10.29)
시스템 개발	□ 연계부분 개발 - 싱크설정 및 스케줄러 조정 완료 - 굴착연계 상세조회 기능 개발 완료 □ 관리자 페이지 개선 - 지하시설물 통계기능 보완 작업 완료 □ 지반관리시스템 연계방안 협의 - DB설계서 인수 및 업무협의 □ 시스템테스트 진행 - 10.21 ~ 10.23		□ 사용자 교육계획 관련 협의 □ 준공 관련 검토 - 준공 성과물 검토 - 준공서류 검토
기타	□ 사업관리 - 운영자 매뉴얼 작성 - 교육계획 수립		□ 사업관리 - 성과물 납품
미결업무 및 대책	내 용		대책 및 조치사항
협의 사항	□ 지반정보(시추공) 조회 기능 추가 검토 - 통합공간정보시스템(SDW) 연계를 통한 시추공 정보 추가 - 시추공의 위치 및 속성정보 조회 기능 개발 □ 사용자 교육 관련 협의 - 11월 중 교육대상자 수요조사 실시 및 교육교재 작성 - 교육대상 : 자치구 굴착복구 담당자, 유관기관 담당자, 기타 시스템 사용자 □ 기타사항 - 유관기관, 내부 사용자 로그인 혼동 방지를 위한 페이지 수정사항 검토 - 완료보고회 일정 협의 : 완료보고회 10.29(수) - 준공 산출물 준비 철저 요청
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용