문서번호	시설관리과-22643
결재일자	2014.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김재엽	최양주	이자원	10/27 이상래
협 조

준공기한 연기 보고

<2014년 아리수 직결음수대 설치공사(경서중학교외 8개소)>

2014. 10

2014년 아리수 직결음수대 설치공사(경서중학교외 8개소)』

준공기한 연기 보고

『2014년 아리수 직결음수대 설치공사(경서중학교외 8개소)』와 관련하여

준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 아리수 직결음수대 설치공사(경서중학교외 8개소)

○ 공사개요 : 관부설 D=15~20㎜, L=278m,

음수대 설치-36개소(복도용-14개소, 사무실용-19개소, 급식실용-3개소)

○ 공 사 비 : 금18,900,090원(도급비)

○ 공사기간 : 2014.08.05. ~ 2014.11.02.

○ 도 급 자 : ㈜유신플랜테크  홍석표

○ 공 정 율 : 95%(관부설 및 복도용 음수대 설치 완료)

□ 연기사유

○ 2014년 아리수 직결음수대 설치공사가 착공되어 관부설 공사는 완료하였으나, 음수대(사무실용 및 급식실용) 미설치로 인하여 공사시공상태 및 하자여부등 검사를 시행치 못한 실정임.

○ 상수도사업본부에서 발주한 음수대 납품선정업체인 ㈜구츠에서  음수대 납품 및 설치일정을 제출받은 결과, 준공기한 내에 설치가 불가하여 후속 공정작업 수행을 위해 음수대(복도용) 설치 가능시기 이후로 준공기한을 연기하여야 할 실정임.

□ 조치계획

○ 준공기한 연기

당초 준공기한	변경 준공기한
2014.11.02(일)	2014.12.02(화)

○ 귀책소재 : 강서수도사업소

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임 : 아리수음수대 납품 및 설치계획서 제출 1부.  끝.