투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	공사감독2처
제목	공사 현황보고(자하문터널 타일 들뜸) 사항에 대한 통보

1. 시설관리공단 공사감독2처-17238호(2014.10.15.)와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 위탁감독 수행 중인『자하문터널 보수공사』와 관련 실정보고된 타일 들뜸현상에 대하여는 분야별 전문가의 자문을 거쳐 아래와 같이 통보하오니 공사에 반영하시기 바랍니다.

가. 자문 결과

1) 타일들뜸이 심하여 전도 시 시민의 안전사고 위험이 있는 청운동 방향은 타일 전체를 신속히 철거(철거 부분에 대한 처리계획은 추후 통보 예정).

2) 부암동 방향은 들뜸이 심한 타일 부위에 전도방지를 위한 안전장치를 설치(콘크리트 앙카와 알미늄 쫄대 등으로 안전대 설치).

3) 타일 철거 전 전도방지를 위한 사전 안전조치를 취하고 공사시행 시에도 안전관리에 만전을 기하기 바라며, 공사에 차질이 없도록 우선 공사 시행 후 추후 설계변경에 반영 조치. 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이광신		시설보수과장	전결 10/27 정재현
협조자
시행	시설보수과-7714	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 한천로 913(번동365-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)944-5451	/전송	02)945-5073	/	kslee0317@seoul.go.kr	/	대시민공개