투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	단가계약물품 변경구매-관급자재(레미콘)(한강도심생태공원확충조성사업)

1. 생태공원과-2278(‘14.10.7)호와 관련입니다

2. 위호로 구매요청한 관급자재에 대하여 해당부서에서 변경요청이 있어 다음과 같이 계약을 변경하고자 합니다.

가. 건  명 : 관급자재(레미콘)(한강도심생태공원확충조성사업)

나. 변경내역

(단위:원)

납품 요구 번호	식별변호	품 명	규 격	수 량 변 경			금 액 변 경			비고
				당초	변 경	증․ 감	당 초	변 경	증․ 감
12-13-1-42271-01	10063090	레미콘	25-18-08	629㎥	526㎥	감103㎥	34984980	29,245,600	감5,739,380
12-13-42271-01	10063096	레미콘	25-21-12	113㎥	113㎥ (검수완료)	증감없음	6,924,640	6,924,640	증감없음

다. 변경사유 : 발주부서 공사계획 변경

붙임  변경요청서 1부. 끝.

주무관	이규옥		총무과장	10/27 최대봉
협조자
시행	총무과-16266	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0713	/전송	02-3780-0740	/	santamam@seoul.go.kr	/	대시민공개