투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시지방경찰청장(교통관리과장)
(경유)
제목	강동 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 교통소통대책 공기연장 요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 시행중에 있는 “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 암사 정수센터앞 교차로 임시개통에 따른 교통소통대책에 대하여 아래와 같이 공기연장 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 아  래

구 분	위 치	공 기	비 고
당 초	암사정수장 교차로	2014. 8.15. ~ 2014.11.30
변 경	“	2014. 8.15. ~ 2015. 8.31

붙 임 : 공사중 교통관리계획 도면 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이한규		광역도로과장	최광무		토목부장	전결 10/28 노우성
협조자
시행	토목부-20942	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개