문서번호	시설과-5265
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	한성현	10/28 代조준수
협 조

2014년 토목시설물 정비공사(하반기-연간단가)

설계변경(1차) 계획 검토 보고

2014. 10

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

2014년 토목시설물 정비공사(하반기-연간단가)

설계변경(1차) 계획 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 『2014년 토목시설물 정비공사(하반기-연간단가)』의 예산 추가배정과 공사물량 증가 및 신규공종에 따른 설계변경 검토 보고 임.

Ⅰ	공 사 개 요

1. 공 사 명 : 2014년 토목시설물 정비공사(하반기-연간단가)

2. 위   치 : 월드컵공원 및 산하공원

3. 공사기간 : 2014. 8. 14. ~ 2014. 12. 31.

4. 공사개요 : 공원포장도로 소파보수, 배수시설 정비, 기타 토목시설물 정비

5. 공 사 비 : 금90,749,450원

(도급비 68,599,450원, 관급자재비 13,594,000원, 폐기물처리비3,383,000원,   이설비 5,173,000원)

6. 도 급 자 : 기웅공영주식회사 대표 전용태

Ⅱ	설계변경 검토내용

1. 설계변경 사유

❍ 신규공종 발생 및 수량 변경에 따른 설계변경 실시

2. 주요공종 변경내용

공 종	규 격	단위	수 량
			당 초	변 경
절삭후 아스팔트덧씌우기	기계T=5cm, 노면파쇄기+피니셔	a	12	10
마사토포설	T=7.5cm	㎥	10	40
융착형도료(자동식) -백색,실선	15㎝	m	0	876
융착형도료(자동식) -백색,파선	15㎝	m	0	45
융착형도료(자동식) -황색,실선	15㎝	m	0	1,610
융착형도료(자동식) -황색,파선	15㎝	m	0	90
융착형도료(수동식) -백색,문자기	15㎝	m	0	193
융착형도료(수동식) -백색,횡단보	15㎝	m	0	72
차선제거 (건식흡입 수동식),제거	15㎝	m	0	2,763
차선규제봉설치	h=450mm	개	0	400

2. 공사비 증감내역

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총 공 사 비		금90,749,450원	금90,749,450원	-
도급비	공 급 가 액	금62,363,137원	금61,979,091원	(감)384,046
	부가가치세	금6,236,313원	금6,197,909원	(감)38,404
	계	금68,599,450원	금68,177,000원	(감)422,450
관 급 비		금13,594,000원	금13,753,000원	(증)159,000
폐기물처리비		금3,383,000원	금3,383,000원	-
이 설 비		금5,173,000원	금5,436,450원	(증)263,450

Ⅲ	조 치 계 획

❍ 상기 검토내용 및 변경설계서에 따라 설계변경을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 설계서(변경1차) 1부

2. 제비율 검증 1부.  끝.