함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고에 따른회신 및 회의개최 알림

1. 상수도공사감동2처-17827(2014.10.23)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 위탁감독중인『도봉산역~도봉파크빌아파트간 송배수관 정비공사-1차(1,7호선 추진구간)』의 실정보고에 대하여 아래과 같이 회신하오며,

3. 공사 추진이 지연되고 있어 조속한 공사가 이루어 질수 있도록 촉구하오니 도급사와의 공정협의등 공사진행에 만전을 기하여 주시고,

4. 아울러 원할한 공사를 위한 발주처, 감독기관, 도급사의 의견 수렴을 위해 따로 붙임과 같이 회의를 개최할 예정임을 알려 드립니다.

아      래-

가. 작업구 용수발생에 따른 가시설공사 시 차수공법 건에 대하여 귀 공단의 의견이 타당한 것으로 판단 승인 통보하오니 우선 시행하시고 추후 설계변경시 반영토록 할 것.

나. 작업구 설치구간에 저촉되는 상수도관(D=100mm)에 대하여는 원할한 공사진행을 위해 관내 연간단가 업체에 작업지시하였으니 도급사와의 공사일정등을 조정 협의 할 것.

따로붙임 : 회의 개최 알림 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	문병희		급수운영과장	전결 10/28 김수영
협조자
시행	급수운영과-20098	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/	mbbhh0309@seoul.go.kr	/	대시민공개