문서번호	토목부-20917
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상근		이동훈	10/28 노우성
협조

설계변경 검토보고(전체 3회, 2차 2회)

『서남권 돔야구장주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계변경 검토보고(전체 3회, 2차 2회)

「서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치및 고척교 확장공사」

「서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장)설치 및 고척교 확장공사」시행 중 책임감리원의 설계변경 요청에 대한 검토 보고임

1		관련근거

❍ 삼보 2014-1431(‘14.10.27.) : 2014년도 변경설계서(전체 3회변경, 2차 2회변경)

2		공사개요

❍ 공 사 명 : 서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장)설치 및 고척교 확장공사

❍ 위    치 : 구로구 고척동 63-6 서남권 돔야구장 주변(안양천길 상부, 고척교)

❍ 규    모

- 보행광장 설치(B=28.3m, L=150m),

- 경사로 및 연결로 설치(N=5개소, B=5~20m)

- 고척교 확장(B=37.5m → 52.5m, L=203m)

❍ 공사기간 : 2013. 4. 8 ∼ 2015. 2. 28

❍ 도 급 비 : 25,020백만원, 2차공사 4,960백만원

❍ 시 공 사 : 대지건설(주), 한동건설(주)

3		실정보고 내용

❍ 감리단 의견

-  보행광장 경사로#1 기초공법 변경 및 우회도로 개설 등 현장 여건 사항 변경등 기 실정보고되어 승인된 사항을 설계변경을 통한 내역 반영

- 전체 계약물량 범위내에서 2차 공사 물량 조정 필요

❍ 설계변경 내용

【단위 : 천원】

구 분	설 계 변 경 현 황			공 사 기 간	비 고
	당 초	변 경	증·감
전체분	25,020,000	25,117,000	증)97,000	‘13. 4. 8.~’15. 2.28.
2차 공사	4,960,043	4,960,043	-	‘13.12.31.~’14.10.31

❍ 주요 변경내용

연번	구 분	변 경 사 유	공사비(천원)	비 고
합계			증)97,000
1	토 공	○ 보행광장 기존 구조물 깨기 - 토목부-6532 (14.04.07) ○ 고척교 사토장 위치변경(4,946㎥) - 토목부-10965(‘14. 6.10.)	증)23,557
2	배 수 공	○ 안양천 진입로 L형측구 복구(L=75m) - 토목부-13759 (14. 7.17.)	증)6,929
3	구조물공	○ 보행광장 목동방향 콘크리트 포장(공사용가도) - 토목부-15701 (14. 8.13.) ○ 경사로#1 기초공법 변경 (강관 9본→마이크로파일 16본) - 토목부-19223 (14.10. 6.) ○ 돔야구장 박스 Jack SUPPORT 설치(305공㎥) 등 - 토목부-13445 (14. 7.14.)	증)33,257
4	포 장 공		-
5	부 대 공	○ 고척교 교대부 수방대책(4개소) - 토목부-10964 (14.06.10) ○ 보행광장(목동방향) 우회도로 안전시설물 추가 (L=133m) - 토목부-8886 (14. 5.10.)	증)33,257

4		조치의견

❍ 실정보고 및 승인된 사항에 대하여 상기와 같이 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙  임 : 1. 책임감리원 검토의견서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.