문서번호	토목부-20926
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
장기철		代최진우	10/28 노우성
협조
	주무관		김성권

지장수목 이식 및 제거 검토보고

(약수고가차도 철거 및 교통개선공사)

2014.10.

도시기반시설본부

(토  목  부)

지장수목 이식 및 제거 검토보고

(약수고가차도 철거 및 교통개선공사)

횡단보도 신설구간 및 환기구 이설구간에 저촉되는 지장수목 이식 및 제거에 따른 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 약수 제14-220호(2014.10.20.) : 실정보고(수목이식 및 제거)

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 중구 신당동 374

○ 개    요 : 고가차도철거(폭 15.4m, 연장 420m), 환기구 이설 3개소

○ 공사기간 : 2013.12.23. ∼ 2014.10.31.

○ 도 급 비 : 5,828,420천원

○ 시 공 사 : 용성종합건설㈜ 외 2    ○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트 외 1

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 현 황

- 약수고가차도 철거공사로 인하여 신설 횡단보도 구간 및 환기구 이설구간에 저촉되는 지장수목에 대하여 관리기관인 서울시 중구청과 협의한 결과 이식 및 제거토록 결정

※ 관련공문 : SMIH-14-19049(2014. 3. 4.), 중구 공원녹지과 – 2898(2014. 2.21.) 공원녹지과 – 15755(2014. 9.22.)

○ 주요수량 증감현황

구 분	규 격	단위	수 량			비 고
			당초	변경	증•감
수목제거		주	-	5	5
수목이식		주	-	3	3
관목이식		주	-	135	135
조경석 이설		ton	-	5	5

○ 수목이식 및 제거 현황도

○ 주요공사비 증감

(단위 : 천원)

구 분	규 격	단위	공 사 비			비 고
			당 초	변 경	증•감
순공사비		식	-	4,057	4,057
제 경 비		식	-	2,433	2,433
도 급 액		식	-	6,490	6,490

○ 감리단 검토의견

- 고가차도 철거에 따른 신설 횡단보도 구간 및 환기구 이설구간에 지장수목이 저촉되어 관리기관(서울시 중구청)과 협의결과 수목에 대하여 이식 및 제거하고 고가하부에 있는 조경석은 지정장소로 이설토록 결정되었으며,

- 수목이식 및 제거단가는 신규비목단가로서 서울시 조경공사 설계대가기준에 의거 산출하여 낙찰율(85.515%)을 적용하여 향후 설계변경시 반영하는 것이 타당하다고 판단됨

Ⅳ		조치계획

○ 횡단보도 신설 구간 및 환기구 이설구간에 저촉되는 지장수목을 관리기관(중구청) 협의 결과에 따라 공사의 시급성을 감안 우선 시공자가 이식 및 제거 조치하였으나, 이에 적용되는 모든 단가는 협의되지 않은 사항으로 낙찰율을 적용코자 하며,  추후 설계변경시 반영하여 처리코자 함.

붙  임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.