투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제2회) 시행 - 2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사

우리사업소에서 시행중인 『2014년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회) 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2014. 03. 27 ~ 2015. 02. 28

3. 도 급 비 : 74,824,000원

4. 도 급 자 : 해마건설(주) 대표 송흥섭

5. 설계변경내역

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	119,657,330	149,511,380	증) 29,854,050
도 급 비	74,824,000	87,129,360	증) 12,305,360
관급자재비	44,833,330	62,382,020	증) 17,548,690

6. 설계변경사유 : 붙임 설계변경 검토보고서 참조

7. 예산과목

가. 교통운영과, 교통안전시설물관리, 교통안전시설물유지관리, 도로부속교통안전시설물설치, 시설비 (100,000,000원)

나. 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고잦은곳개선사업, 시설비 (14,347,050원)

다. 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통개선사업, 시설비 (35,164,330원)

붙 임 : 1. 설계변경(제2회) 검토보고서 1부.

2. 변경설계서(제2회) 1부.    끝.

주무관	권세봉		도로보수과장	10/28 이규철
협조자	주무관	이상하		주무관	이경남		주무관	계기남
시행	도로보수과-9647	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동 825번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8354	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개