문서번호	시설과-6381
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
정연준		김인규	10/28 이규상
협 조
	주무관			심찬석
	주무관			최이영
	주무관			문현수

『강북정수장 고도정수처리시설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과 보고

2014. 10. 28.

시 설 안 전 부

(시 설 과)

『강북정수장 고도정수처리시설공사』

계약금액조정 심사 소위원회 결과 보고

『강북정수장 고도정수처리시설공사』의 경비동(후문)쪽 도로 삭제 및 회수조와 현장사무실간 도로 및 산소탱크 옆 도로추가 등 계약금액 변경이 있어, 계약금액조정 심사 소위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 강북정수장 고도정수처리시설공사

○ 공사기간 : 2010.02.18 ~ 2014.10.31

○ 도 급 비 : 55,898.120천원

○ 공사개요 : 고도정수처리시설(오존+입상활성탄) 72만톤/일

○ 시 공 사 : 대보건설㈜  대표 남관우

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

소위원회 개최

○ 일    시 : 2014. 10. 27(월)

○ 심의안건 : 회수조와 현장사무실간 도로 및 산소탱크 옆 도로포장 추가                  (증)19,526천원

○ 검 토 자 : 시설과장 5급 김인규 외 3명

계약금액 조정 근거

○ 공사계약일반조건 제19조의2항(설계서의 불분명, 누락, 오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)에 의거하여 설계변경 및 계약금액 조정 요청

계약금액 조정 내용

○ 경비동(후문) 쪽 도로 삭제 및 회수조와 현장 사무실 간 도로 및 산소탱크 옆 도로포장 추가

○ 기존 정수장 탈수기동과 회수조옆 구간은 공동구 등 공사구간으로 포장복구 및 빗물받이 추가

○ 기존 정수지와 고도정수처리 흡수정 사이 노후도로 개량

○ 공사비 증감내용

<단위 : 천원>

구 분	단위	요 청 내 역					검 토 내 용
		당 초		변 경		증감	수량	금액	증ㆍ감
		수량	금액	수량	금액
도로포장	식	1	435,870	1	453,963	증)18,093	1	453,963	-
부가세	식	1	43,587	1	45,396	증)1,809	1	45,396	-
도급비			479,457		499,359	증)19,902	1	499,359	-

○ 물량 및 품 계산 적정 반영

○ 실적 및 신규단가 협의율 적정 반영(협의율:87.111%)

계약금액 조정 검토결과

○ 공사계약일반조건 제19조(설계변경 등), 제19조의 2항(설계서의 불분명, 누락, 오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경), 제20조(설계변경으로 인한 계약금액 조정)에 의거하여 설계변경 조치 및 계약금액 조정이 타당함.

위 검토자 : 건설공사 계약금액조정 소위원회

팀  장  :  시설과장  지방시설사무관    김 인 규

팀  원  :  고도정수반    지방시설주사    심 찬 석

시 설 과   지방시설주사보    최 이 영

시 설 과  지방시설주사보    문 현 수

붙 임 : 계약금액조정 내역서 1부. 끝.