함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	납품기한 연기결정 〔보광가압장 외 1개소 기전설비 개량 제작 구매 설치〕

1. 시설관리과-28564(2014.10.27)호와 관련입니다.

2.  우리사업소에서 시행중인 『보광가압장 외 1개소 기전설비 개량 제작 구매 설치』 건 대한 납품기한 연기 사유가 발생하여 ‘지방자치단체 입찰 및 계약집행기준’ 제15장 물품계약일반조건 제7절 계약기간의 연장 규정에 의거 아래와 같이 납품기한 연기결정하고 변경계약체결 코자 합니다.

가. 당초 계약사항

계약건명	계약업체		계약일자	납품기한	계약금액(원)
	상 호	대표자
보광가압장 외 1개소 기전설비 개량 제작 구매 설치	********	***	2014.7.04	2014.11.1	***********

나. 계약변경 사항 : 납품기한 변경(연기)

- 당 초 : 2014. 11.01

- 변 경 : 2014. 11.30

다. 납품기한 연기사유 : 보광 가압장 제반 시설(모터 펌프)  미구축

라. 연기사유 귀책소재 : 중부수도사업소

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 선금 지급여부 : 미지급

사. 계약보증서 : 계약보증서 추가 징구

따로붙임 : 1. 납품기한 연기 보고서 1부.

2. 납품기한 연기 합의서 1부. 끝.

★주무관	이영숙		행정관리팀장	김맹순		행정지원과장	서경만		중부수도사업소장	10/28 안운길
협조자
시행	행정지원과-22467	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	3146-2044	/전송	3146-2244	/	yeppney@seoul.go.kr	/	부분공개