문서번호	급수운영과-26468
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
강재성		김광운	10/28 代김태형
협조

2014년 간선배관공사 구간 변경

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

2014년 간선배관공사 구간 변경

2014년 간선배관공사 대상 중 재개발 추진중으로 구간 변경이 불가피함에 따라 대체구간을 선정하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

관련근거

❍ 급수설비과-1258(‘14.2.28, “2014년 간선배관사업비 배정계획”)

간선배관공사 시공불가 사유

공 사 명	공사개요		배정예산 (백만원)	변경 사유
	구경 (mm)	연장 (m)
금호동2가1208-1~501-32간간선배관공사	150	200	120	공사 구간이 재개발추진중 임으로 금년도 사업 불필요

간선배관공사 구간변경 계획

❍ 위지역은 현재 재개발 추진 구간내로 공사시행이 불필요 함으로 대체 구간을 선정하여 본부 심사 요청.

❍ 대체구간 현황

- 위    치 : 성동구 마장동 517 ~ 516-1번지

- 공사개요 : D=150㎜, L=120m

- 선정사유

․ 기존관 현황 : 1990/DCIP/φ80

․ 성동구 마장동 514번지는 D150㎜부설되었으나 516번지는 D80㎜가부설되어있음

․ 위지역 주변은 최근 주변에 건축물을 헐고 다가구형 주책 신축등으로 급수수요가 증가하여 구경협소로 소출수 현상이 발생되고 있는 시점에 마장도 지하차도 확장공사 주변 기반시설 정비와 연계하여 구경확대 정비가 필요함

행정사항

❍ 2014년 간선배관공사 대체구간에 대하여 본부 급수설비과에 보고후 변경 시행..

별첨 : 간선배관공사 현황카드(본부 심사용) 1부.  끝.