문서번호	급수운영과-25724
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
황청연		김용호	10/28 조면행
협 조

단위공사 실정보고에 따른 검토 보고               (신도림동 271-87호 외 1개소 송배수관 정비공사)

2014. 10.

강서수도사업소

급수운영과

단위공사 실정보고에 따른 검토 보고

우리사업소에서 시행하는『신도림271-87호 외 1개소 송배수관 정비공사』에 대하여 시설관리공단으로 부터 실정보고가 있어 이를 검토코자 합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명： 신도림271-87호 외 1개소 송배수관 정비공사

나. 공사개요： D=800mm,1,000mm 제수변설치 각 1개소

다. 공사기간： 2014.05.14~10.31

라. 도 급 액 : 금217,684,360원

마. 계약상대자： (주)제이에이치종합건설 대표 박병희

2. 실정보고 내용 및 검토의견

▶ 관련대호： 공사감독2처-18183호(2014.10.28)

연번	실정보고 내용	공단 조치의견	검토 결과
1	신도림동 구간은 당초 D=1000mm 로 설계되어 있으나 굴착결과 기존관이 D=900mm로 확인	신도림동 구경 변경 (당초1,000mm→변경 900mm)	900mm로 시행하고 설계변경 시행
2	신도림동 구간 안양천변의 발생토는 산업폐재류가 다량 섞여있고,악취발생 물질이 포함된 폐토사로 현장 확인결과 김포매립지 반입이 불가할 뿐아니라 개인 사토장 변경시에도 반입불가	신도림동 구간 발생토 폐토사 처리	우리사업소와 계약 된 폐기물처리 업체에 처리하고 설계변경 시행

3. 조치 의견

실정보고에 대한 검토결과를 공단에 통보, 이를 이행토록하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 시설관리공단 실정보고서 사본  1부.

2. 현장사진 1부. 끝.