문서번호	도로보수과-9778
결재일자	2014.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
백승만		10/28 김권일
협 조

제5차 작업지시 관련 실정보고서(2014년 도로,교통안전부속물 유지보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

강서도로사업소

[도로보수과]

작업지시 관련 실정보고(제5차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014.04.07 ~ 2015.02.28

○ 시 공 사 : (주)토형이엔시 대표 김 용 훈

○ 도 급 비 : 금252,314,700원

□ 보고내용

○ 구로구 교통행정과-31001호(’14.10.08)로 요청된 교통안전시설물 개선요청

○ 교통운영과-18830호(2014.10.10.) 관련 도로안전시설 정비 등

○ 기타 응답소민원접수 사항 및 도로부속물 유지관리대상 보수

○ 보수대상 및 물량

연번	위 치	작 업 내 용	지시물량					작업조건		비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적	경간,개(㎡)	철거(경간)	주간	야간
1	영등포구 영등포동7가 여의2교 남단	단면복구			33.46				■
2	양천구 신정3동 1264 신정3파출소	시선유도봉 철거 및 치				10	10	■
3	경인로 롯데마트 월편 구로구 경인로 1258 앞	시선유도봉 설치				12	2	■
4	강월초교 입구 사거리	시선유도봉 설치				30		■
5	강서구 양천길 마곡레포츠센터 전	미끄럼방지재설치	3.00	95.00	285.00			■
6	영등포구 의사당대로 83 여의도지하차도 입구 안전지대	시선유도봉설치				10	10	■
7	구로구 시흥ic 램프 구간	갈매기표지설치60*45				2		■
8	영등포구 여의도 환승센터 3번승강장	보도블럭 정비	1.50	1.50	2.25			■
9	구로구오류고가차도하부	도로경계석 철거					26	■
10	구로구오류고가차도하부	시선유도봉설치				6		■
11	강서구 양천길 강서소방서 앞	시선유도봉설치				13

□ 조치계획

○ 위 보수대상을 도급업체에 아래와 같이 작업지시하여 보수코자하며 추후 설계변경시 정산처리하고자 합니다.

- 건    명 : 2014년 도로,교통안전부속물 유지보수공사-제5차 작업지시

- 작업위치 : 영등포구 여의2교 남단 옹벽 단면보수 외 10개소

- 작업기간 : 2014.10. 28 ~ 2014.11. 27

- 공종 및 물량 : “별첨 작업지시내역”

- 소요금액 : 약30,789천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 원)

공 사 명	도 급 비	개략 집행공사비 (1차 정산 포함)	금회사용 (4차)	비고 (잔액)
2014년 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)	252,314,700	126,796,000	30,789,000	94,729,700

첨  부 1. 제5차 작업지시서 및 위치 현황 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.  끝.