문서번호	기전과-7544
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
차준원	채희준	10/29 최주용

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경 승인 요청에 따른 검토 보고 -옥수12(표지)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

성동도로사업소

(기 전 과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

변경승인에 따른 검토 보고

교통안전시설물 원인자 부담공사 변경승인 요청이 있어 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

㈜영호이앤씨 영원 14-10-01호(2014.10.01.)

�

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 교통안전시설물 설치공사(옥수12구역-표지)

공사구간 : 성동구 옥수12구역 주변

공사참여자 및 공사기간

구분	공사참여자			공사기간	원인자
	시공사	감리사	설계사
표지	태경이엔지㈜	㈜영호이앤씨	㈜웨텍	2012.12.28~2014.04.30	삼성물산(주)

Ⅲ		변경요청 및 실정보고 검토결과

위치(교차로명)	현황 및 문제점	변경요청의견	검토경과
옥수12구역 레미안아파트 주변	우합류도로 표지판 중차량 충돌위험	표지판 위치 변경 설치	현장 검토 결과 표지판과 차량 충돌 위험이 있어 전방으로 이설 설치 승인함이 타당함

붙    임 : 1. 원인자부담공사 실정보고 1부. 끝.