행정사무감사 요구자료 제출

시 행	토목부-20984	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.10.29.
보존기간	년
수 신 자	건설총괄부장

주무관		토목총괄과장	토목부장		결재
최진우		김영수	10/29 노우성
협 조

제 목	행정사무감사 요구자료 제출(요구번호 92번, 유광상의원, 도시안전건설위원회)

행정사무감사 요구자료를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

붙  임 : 행정사무감사 요구자료 1부.  끝.

유광상 의원(도시안전건설위원회, 새정치민주)

92. 월드컵대교 건설공사 관련

(1) 당초 연도별 예산집행계획 및 예상공정율 대비 실제 현황

(2) 예산부족에 따른 공사기간 변경여부 및 공사기간 연장시 문제점

(3) 시공사로부터 애로사항 제기 현황

□ 당초 연도별 예산집행계획 및 예상공정율 대비 실제 현황

○ 당초 연도별 예산집행계획 (2010. 3. 22 착공 기준)

(단위:백만원)

총사업비	기투자	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
258,858	9,220	7,500	30,000	50,000	50,000	50,000	62,138

○ 예상공정율 대비 실제 현황 (2010. 3.22 착공 기준)

- 예상 공정율 (2014. 9.30) :  71%

- 현재 공정율            :  19%

- 계획 대비              :  27%

□ 예산부족에 따른 공사기간 변경여부 및 공사기간 연장시 문제점

○ 예산부족으로 공기기간 연장 필요

- 당초 준공기한 : 2015.  8. 22

- 변경 준공기한 : 2020. 12. 31

※ 서부간선도로 확장공사(민자) 준공시기와 연계

○ 공사기간 연장시 문제점

- 시공사에서 공사간접비 지급요청 민원발생우려

□ 시공사로부터 애로사항 제기 현황 : 현재까지 없음

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	김 영 수
	☎ 3708-2542	담 당 자	최 진 우
	작 성 일 : 2014.10.

이곳에 본문을 입력하세요