문서번호	한양도성연구소-3031
결재일자	2013.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	한양도성연구소장	경영지원부장		역사박물관장
최경수	박상빈	김광식		10/21 강홍빈
협 조
	학예연구부장		박현욱
	총무과장		연규승

교육실/자료정보실 리모델링 조성공사 시행계획

2013. 10

서울역사박물관

(한양도성연구소)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

교육실/자료정보실 리모델링 조성공사 시행계획

현재 서울디자인센터 지상1층에 설치된 디자인정보 학습존을(디자인연구자료실) 지상5층으로 이전 설치하고, 그 위치에 한양도성 교육실/자료정보실/교육준비실 등 리모델링 공사를 아래와 같이 시행하고자 합니다

1. 추진근거

□ 한양도성전시관 장소 변경계획(행정1부시장 방침 205호, ’13. 05. 03)

□ 한양도성부속시설 조성을 위한 예산의전용 사용계획(한양도성연구소-2961호, ’13. 10. 16)

2. 공사개요(소요추정예산 : 275,069천원)

2-1 건축공사

□ 조성개요

o 위치 : 서울디자인센터 1층(면적:523.63㎡) 내

o 내용 : 교육실/자료정보실/교육준비실/휴게실 등 리모델링 공사

□ 추정예산 : 156,189천원

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

□ 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조,한양도성전시관운영,한양도성                 연구소․연구소운영,시설비(401-1)

〈 평면도 〉

2-2 전기공사

□ 조성개요

o 위치 : 서울디자인센터 1층(면적:523.63㎡) 내

o 내용 : 교육실/자료정보실/교육준비실/휴게실 등 전기 설치공사

□ 추정예산 : 21,500천원

□ 계약방법 : 수의계약

□ 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조,한양도성전시관운영,한양도성                 연구소․연구소운영,시설비(401-1)

2-3 정보통신공사

□ 조성개요

o 위치 : 서울디자인센터 1층(면적:523.63㎡) 내

o 내용 : 교육실/자료정보실/교육준비실/휴게실 등 정보통신설치공사

□ 추정예산 : 17,820천원

□ 계약방법 : 수의계약

□ 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조,한양도성전시관운영,한양도성                 연구소․연구소운영,시설비(401-1)

2-4 기존시설물(디자인연구자료실) 분야별 이전 설치

□ 조성개요

o 내용 : 서울디자인지원센터 지상1층에 설치된 디자인정보학습존

(디자인연구자료실)을 지상5층으로 이전 설치

□ 추정예산 : 20,000천원

□ 계약방법 : 수의계약

□ 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조,한양도성전시관운영,한양도성                 연구소․연구소운영,공공운영비(201-02)

2-5 물품의 구매

□ 방송설비A/V

o 위치 : 서울디자인센터 1층(면적:523.63㎡) 내 교육실

o 추정예산 : 21,740천원

o 계약방법 : 조달계약

o 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조,한양도성전시관운영,한양도성

연구소․연구소운영,자산및물품취득비(405-01)

□ 도서관리시스템

o 위치 : 서울디자인센터 1층(면적:523.63㎡) 내 자료정보실

o 추정예산 : 17,820천원

o 계약방법 : 수의계약

o 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조,한양도성전시관운영,한양도성

연구소․연구소운영,자산및물품취득비(405-01)

□ 교육용 가구

o 위치 : 서울디자인센터 1층(면적:523.63㎡) 내 교육실

o 추정예산 : 20,000천원

o 계약방법 : 수의계약

o 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조,한양도성전시관운영,한양도성

연구소․연구소운영,자산및물품취득비(405-01)

3. 추진일정

□ ’13. 10. 18 : 예산전용 승인(예산담당관)

□ ’13. 10   : 공사발주 및 계약체결

□ ’13. 11   : 서울디자인센터 내 디자인연구자료실 이전 설치

□ ’13. 11 ~ : 공사착공 및 물품구매

□ ’14. 01   : 공사준공