함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰 〔보광가압장 외 1개소 기전설비 개량 제작 구매 설치〕

우리 사업소에서 시행중인  『보광가압장 외 1개소 기전설비 개량 제작 구매  설치』 건에 대한 납품기한 연기 사유가 발생하여  ‘지방자치단체 입찰 및 계약집행기준’ 제15장 물품계약일반조건 제7절 계약기간의 연장 규정에 따라 납품기한 연기결정하고 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 당초 계약사항

계약건명	계약업체	계약일자	납품기한	계약금액(원)
보광가압장 외 1개소 기전설비 개량 제작 구매 설치	******** * *** *	2014. 7. 04	2014.11.01	***********

나. 계약변경 사항 : 납품기한 변경(연기)

계약건명	납품기한		선금지급 여 부	연기사유 귀책소재	지체상금 부과여부
	당 초	변 경
보광가압장 외 1개소 기전설비 개량 제작 구매 설치	2014.11. 01	2014. 11.30	미지급	중부수도 사업소	미부과

다. 납품기한 연기사유 : 보광가압장 제반 시설(모터펌프) 미구축

라. 계약보증서 : 계약보증기간 연장에 대한 계약보증서 추가징구 대상

따로붙임 : 1. 납품기한 연기결정문 1부.

2. 합의서 1부. 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	이영숙		행정관리팀장	김맹순		행정지원과장	전결 10/29 서경만
협조자
시행	행정지원과-22545	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	3146-2044	/전송	3146-2244	/	yeppney@seoul.go.kr	/	대시민공개