문서번호	교량보수과-4114
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
나철흠		김환겸	10/29 송상영
협조

(상행1교 외 6개소 정밀점검용역)

설계변경(준공) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

동부도로사업소

(교량보수과)

(상행1교 외 6개소 정밀점검용역)

설계변경(준공) 검토 보고

상행1교 외 6개소 정밀점검용역 시행중 지난 10.7(화) 개최한 자문회의(최종보고회) 결과 하행1교의 구조안전성 검토와 자문비 정산에 따른 설계변경 시행 보고임

Ⅰ	용역개요

용 역 명 : 상행1교 외 6개소 정밀점검용역

시설규모

시설물명	위 치	규격(m)		구조 형식	설계 하중	준공 연도
		폭원	연장
상행1교	잠실5동 주공아파트 뒤	17.4	70.0	RA	DB-24	1985
상행2교	잠실4동 장미아파트 뒤	17.4	20.0	RA	DB-24	1985
상행3교	강동구 풍납동 4	17.4	40.0	RA	DB-24	1985
상행4교	강동구 천호동 337	17.4	15.0	RA	DB-24	1985
하행1교	강동구 천호동 337	17.4	40.0	RA	DB-24	1985
하행2교	강동구 풍납동 4	17.4	15.0	RA	DB-24	1985
하행4교	잠실5동 주공아파트 뒤	17.4	20.0	RA	DB-24	1986

용역기간 : 2014.6.10.~11. 30.

용 역 비 : 51,553,600원

용 역 사 : 코비스건설(주) 박상혁(사업책임기술자 조항승)

Ⅱ	보고내용

2014.10.7.(화) 실시한 자문회의(최종보고회)시 제시된 하행1교 교각부 수직균열에 대한 『구조안전성 검토계획(교량보수과-3895호,2014.10.10.)』에 따른 구조해석비 반영

자문회의(최종보고)시 자문위원(4명) 대한 기술자문비 정산보고임.

설계변경 현황

○ 공종별 증.감 내역

공 종	단위	수 량			금 액(천원)			비 고
		당초	변 경	증∙감	당 초	변 경	증∙감
합 계					1,126	1,789	증) 663
구조안전성 검토	식	-	1	증) 1	0	1,389	증) 1,389
기술자문비	인	10	4	감) 6	1,126	400	감) 726

○ 총괄내역

구 분		변 경 내 역			비 고
		당 초	변 경	증, 감
총 용 역 비		51,553,600	52,216,711	증) 663,111
도급비	공급가액	46,866,909	47,469,738	증) 602,829
	부가가치세	4,686,691	4,746,973	증) 60,282
	계	51,553,600	52,216,711	증) 663,111

Ⅲ	조치계획

“따로붙임” 설계내역과 같이 설계변경(준공) 시행코자 함.