문서번호	교량보수과-6839
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
정병구		이수근	10/29 김만수
협조
	주무관		백운경

『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)』

낙찰차액 및 추가배정액 사용계획 보고

2014. 10. 27

서부도로사업소

(교량보수과)

『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)』

낙찰차액 및 추가배정액 사용계획 보고

시설물의 구조적인 결함 및 손상원인을 정비함으로써 기능회복을 도모코자 시행하는 『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)』와 관련하여 소요예산 부족분에 대하여 낙찰차액 및 추가 재배정액 등을 활용하여 시설물의 유지관리에 만전을 기하고자 예산집행계획을 보고합니다.

□ 추진근거

○ 도로시설과-15397호(2014.08.29) : 2014년 한강교량 일상유지보수예산 재배정(2차-100백만원)

○ 도로시설과-17348호(2013.10.07) : 낙찰차액 등 예산집행 잔액 활용지침

○ 감사담당관-9474호(2014.07.10.) : 한강교량 특별점검 결과에 대한 조치요구

○ 교량보수과-6192호(2014.09.30.) : 17차 작업지시

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가-서부)

○ 공사기간 : 2014. 4. 9 ~ 2014. 2. 28

○ 공사개요 : 신축이음보수 54m, 표면처리 3,050㎡, 단면복구 71㎡

강재도장(외부 233㎡, 내부 377㎡)

○ 공사금액 : 총공사비 934,791,350원

(도급비 876,391,350원, 관급비 53,000,000원, 폐기물 5,400,000원)

○ 시 공 자 : 케이디엠건설(주) 대표 강영숙

○ 감독기관 : 한강교량 일상유지보수공사 책임감리(대한컨설탄트)

□ 예산현황

(단위 : 원)

예 산 액	발주금액	도 급 액	낙찰차액	추가배정액	관급자재 잔액	비고
1,157,000,000	998,600,000	876,391,350	122,208,650	100,000,000	47,026,310

※ 활용가능액 : 낙찰차액 + 추가 재배정액 + 관급자재 잔액

= 122,208,650원 + 100,000,000원 + 47,026,310원 = 269,234,960원

□ 보고내용

○ 감사지적사항 및 안전점검 결과조치를 위한 예산부족

- 원효대교 남단접속교 강구조물 점검 지적사항 및 한강교량(서강,마포,원효) 유지관리, 2014년 5월 특별점검 지적사항 이행을 위한 소요예산 부족발생

- 소요예산 부족분에 대하여 낙찰차액과 추가 재배정액 등을 활용하여 정비코자 함.

○ 예산 부족현황

(단위 : 천원)

연번	시설물명	보수위치 및 내용	공 종	소요예산	비 고
1	마포대교	하류교 A1,P5,P14 등	단면보수 외	20,000	특별점검 지적사항
2		남단강교 조류서식퇴적물	강재도장	21,000
3	양화대교	램프2 교대	신축이음보수	7,000	특별점검 지적사항
4	원효대교	남단접속교	강재도장 외	31,000	작업지시 예산부족
5		북단램프 B,C	표면보수 외	110,000
6	서강대교	P6~P9	단면보수	34,000
7		북단접속교	표면보수	10,000	응답소 민원
계				233,000

□ 조치계획

○ 추가 정비물량에 대하여 낙찰차액 및 추가 재배정액, 관급자재 잔액을 활용하여 정비코자 함.

○ 예산 사용계획

(단위 : 원)

활 용 가 능 액				추 가 소요예산액	비 고 (잔 액)
낙찰차액	추가 재배정액	관급자재 잔액	계
122,208,650	100,000,000	47,026,310	269,234,960	233,000,000	36,234,960

□ 향후계획

○ 『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)』 책임감리단에 통보하여 공사시행 및 추후 설계변경 시 정산조치코자 함.

별첨 : 1) 도로시설과 예산 재배정 공문 1부.

2) 한강교량 특별점검 지적사항 1부.

3) 도로시설과 예산집행(낙찰차액 등 사용) 공문 1부.

4) 한강교량 일상유지보수공사 작업지시 현황 1부.   끝.