투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	산림내 위험사면 정비공사 설계변경 시행

1. 조경과-5619(2014.10.29.)호와 관련입니다.

2. 대공원 사면보호를 위해 시행 중인 「산림내 위험사면 정비공사」에 대해 아래와 같이 설계변경하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 산림내 위험사면 정비공사

나. 공사내용 : 벽면보호브럭 및 식생매트 설치, 낙석방지책 설치 등

다. 공사기간 : 2014. 9. 15 ~ 11. 03

라. 도 급 액 : 금25,578,100원

마. 시 공 사 : 안성시산림조합 대표 장근홍

바. 변경내역

구 분	변 경 전	변 경 후	증·감	비고
도 급 액	25,578,100원	26,261,900원	683,800원

사. 예산과목 : 푸른도시국 산지방재과, 산림안전관리, 산림재해방지, 산림내 사면정비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 검토보고서 1부. 끝.

주무관	김성태		주무관	김흔진		조경과장	10/29 이성주
협조자	주무관	김희준		총무과장	이경로
시행	조경과-5633	(		)	접수		(		)
우	427-080	경기 과천시 막계동 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7542	/전송	02-500-7993	/	kst2006@seoul.go.kr	/	부분공개