문서번호	토목부-19660
결재일자	2013.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토목설계과장	토목부장	시설국장
강철규	나상호	김만수	10/23 이광세

설계자문회의(2차) 개최 결과보고

[신월지하차도 평면화 기본 및 실시설계]

2013. 10. 22.

도시기반시설본부

토   목   부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(	지역주민-공람공고중	)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(	지역주민-공람공고중	)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(	분야별 전문가	)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	건설기술관리법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	양천구청,양천경찰서	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

설계 자문회의 개최 결과보고

Ⅰ.				사 업 개 요

○  위    치 : 양천구 신월6동 신월지하차도(강월초교입구 교차로)

○  규    모 : 평면화 폭 30m, 연장 200m

- 지하차도 폐쇄 및 하수암거 설치

○  사업기간 : 2012. 5 ~ 2014. 5 (설계: `13.2.7 ~ `13.11.4)

○  총사업비 : 2,500백만원 (설계비 : 97백만원, 공사비 등 2,388백만원)

Ⅱ.				자 문 개 요

○ 일    시 : 2013. 10. 22(화) 16:00~17:30

○ 장    소 : 후생동(소담) 3층(난실)

○ 안    건 : 신월지하차도 평면화 기본 및 실시설계용역

○ 참 석 자

- 위원장 :	도시기반시설본부	시설국장	이 광 세(代김만수)
- 위 원 :	㈜진우엔지니어링	대표	양 현(도로)
	㈜극동엔지니어링	대표	이 철 준(도로)
	한국교통연구원	실장	김 주 영(교통)
	㈜혜동브릿지	사장	김 영 섭(시공)
	㈜서용엔지니어링	부회장	손 창 섭(상·하수도)
	도시안전실	도로계획과장	정 시 윤(불참)
	강서도로사업소	소장	변 봉 섭
	양천구청	건설교통국장	정 옥 란(代김영삼)
	도시기반시설본부	토목부장	김 만 수

○ 보고자 : (주)제일엔지니어링 도로부 최 재 홍 이사

Ⅲ.				자 문 결 과 (주요내용)

○ 지하차도 평면화후 교통운영체계는 지역주민들의 요구하는 전방향 좌회전 허용시 교차로에서 교통정체(지체도 177초/대)가 극심하게 되어 경찰청 협의(규제심의)가 어려울 것이며,

교통소통 및 접근성 측면을 고려할 때, 현재와 같이 3현시(남부순환도로에서 신월로로 좌회전 허용)로 운영(지체도 89초/대)하는 것이 바람직하나,  주민 요구민원 등을 감안 4현시 운영 방안에 대하여도 경찰청과 협의 필요

○ 신월로의 차로폭원이 3.0m로 협소하므로 중차량 통행시 측구 손상 등을 방지하기 위하여 길어깨 최소폭원을 만족할 수 있도록 L형측구(0.5m)외에 최소 측대폭원(0.25m)을 확보하고, 공사중 교통불편이 최소화 되도록 공사중처리계획 수립 필요

○ 지하차도(박스) 구간에는 하수암거를 설치하지 않고 임시저류조로 활용하는 계획은 하수암거 단면이 지하차도(박스) 구간에서 크게 확대됨에 따라, 토사퇴적 등 시설물 유지관리에 지장이 없도록 유지관리 부서 의견을 반영하고,

신월로(부천 방향)의 종단경사가 급하므로, 유입되는 노면수 배수처리를 위한 우수받이 추가 설치 및 연속적인 노면수 처리에 유리한 시설(원심력 사각수로관) 적용 필요

Ⅳ.				조 치 계 획

○ 자문의견 내용을 반영하여 상세 설계를 추진코자 함.

붙임 : 자문의견 조치계획 1부.  끝.