문서번호	기전과-7524
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
채희준		10/29 최주용
협 조

『교통소통개선공사(광장사거리 외 1)』

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통소통개선공사(광장사거리 외 1)』

설계변경 검토 보고

『2014년 교통소통개선 교통신호기공사(광장사거리 외 1)에  대하여 설계변경을 시행하고자 합니다.

관련근거

○ 2014년 교통소통개선 교통신호기공사 설계변경서 제출

-도로교통공단 안전시설부-25(2014.10.28.)호

공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통소통개선 교통신호기공사(광장사거리 외1)

○ 공사기간 : 2014.08.01. ~ 2014.12.31

○ 도 급 자 : ㈜대륭전력통신 대표이사 정병구

○ 계약금액 : 46,659,200원

○ 감 리 사 : 도로교통공단(책임감리원 구재선)

설계변경 현황

○ 설계변경 사유 : 실정보고한 사항에 대한 시공물량 증감 및 제경비(건강보험료 등) 정산에 의한 설계변경

○ 도급비 변경내용

공 사 명	도 급 비		변 경 사 유	비 고 (증 감)
	당 초	변 경
2014년 교통소통개선 교통신호기공사 (광장사거리 외 1)	46,659,200	47,855,500	물량 증감 및 제경비 정산에 의한 설계변경	증1,196,300

○ 주요공종 변경 내용

공 종	수량	변경전	변경후	증감	비 고
보행지주(150,125mm) 신설	본	0	2	2	시공물량 변경
보행지주(125mm*6m)신설	본	2	0	△2	“
경보점멸기 이설(함체)	개	0	1	1	“

○ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리

강화, 도로교통 소통개선, 시설비(401-01)

조치의견

○ 상기와 같이 2014년 교통소통개선 교통신호기공사(광장사거리 외 1)에 대하여 설계변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 감리원 설계변경 서류 1부. 끝.