투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	폐기물처리용역 설계변경 계약 의뢰(약수고가차도)

우리본부에서 시행중인『약수고가차도철거및교통개선공사 건설폐기물처리용역』과 관련하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 약수고가차도철거및교통구조개선공사건설설폐기물처리용역

나. 용역개요 : 폐기물 처리 및 운반

다. 용역금액 : 200,791,000원

라. 용역기간 : 2014. 4.28.∼2014.10.31.

마. 용역업체 : ㈜디엘이엔에스

바. 요청내용 : 준공 설계변경 임.

구분	계약금액(원)			계약기간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
전체	200,791,000	249,200,000	증)48,409,000	2014.4.28～ 2014.10.31	변경없음

붙  임 :  1. 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 각1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김성권		토목총괄과장	김영수		토목부장	10/29 노우성
협조자	주무관	장기철
시행	토목부-20993	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사2동 3층(도시기반시설본부 토목부)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2547	/전송	02-3708-2599	/	sssggk@seoul.go.kr	/	대시민공개