문서번호	교량보수과-6865
결재일자	2014.10.29.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
정병구		이수근	10/29 김만수
협조	주무관		백운경
	주무관		우창원

2014년 자체정밀점검 완료보고 (외부전문가 합동점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10. 28

서부도로사업소

(교량보수과)

2014년 자체정밀점검 완료보고

(외부전문가 합동점검)

2014년 자체 정밀점검 계획에 의거 외부전문가를 활용하여 동빙고다리외 12개 시설물에 대하여 합동점검을 완료하고 자체 정밀점검 최종보고서 제출되어 이를 검토하고 결과를 보고합니다.

추진근거

서부도로사업소장 방침(교량보수과-2954호, 2014.5.12.)

- 교량, 고가시설물 자체 점검용역 시행계획(외부전문가 합동점검)

시설물의 안전점검 및 정밀안전진단지침

기술용역타당성 심사결과(자체점검용역으로 시행토록 결정-기술심사담당관)

추진방향

외부전문가와 합동으로 점검을 시행하여 자체 점검용역을 내실화

2종, 법정외 시설물을 통합 발주하여 점검용역의 효율성 제고

점검대상 시설물 : 13개 시설물

구 분	일 반 교 량		지 하 차 도
	2 종	법정외	2 종
시설물명	¹동빙고다리 ²망원3교, ³망원4교 ⁴반포대교북단교 ⁵원효로접속교 ⁶당인교, ⁷청암교	¹원효대교북단교 ²서빙고다리 ³새남터다리 ⁴봉원교 ⁵두모교접속교	한강대교동측지하차도
시설물수	7	5	1

자체 정밀점검용역 개요

점검기간 : 2014. 5. 12 ~ 9. 30

점검대상 시설물 및 외부전문가

연번	자체 점검용역 대상	외부전문가	사 업 비	담당자
1	망원3교,망원4교,새남터다리	SQ엔지너어링 전용형,이두원,조영선	12,128,700원	백운경
2	두모교접속교,서빙고다리 동빙고다리	스마트이앤씨 이상범,이경복,채상윤	13,743,610원	우창원
3	반포북단교,원효로접속교	한국재난연구원 조만천,최윤정,홍영철	11,175,260원	우창원
4	청암교,봉원교 원효대교북단교	제이엘건설연구소 이재형,곽충성,최재영	12,725,620원	정병구
5	당인교,한강동측지하차도	대신이엔지(주) 하상우,김성수,이종명	13,562,950원	정병구
계	5건(13개 시설물)		63,336,140원

점검결과

주요 손상내용

- 구조적인 결함사항은 없으나 노후된 일부 시설물에 대한 보수필요

(균열, 철근노출 및 콘크리트 박리 및 파손, 신축이음 및 후타재 파손, 강재녹발생, 아스팔트 소성변형 및 망상균열, 배수구 막힘, 난간 변형 및 지지대 파손등)

공통사항

- 시설물별 종합상태평가는 13개 시설물 모두 B등급으로 평가

- 부재별 지적사항 중 1순위는 신속한 보수로 공용성 증대

- 많은 예산이 투입되는 공정에 대하여는 예산확보 후 조치

(추후 인수·인계 시 해당부서에 예산확보토록 별도 인계서 작성)

시설물별 손상내용

연번	종 별	시설물명	주요 점검결과	조치계획	상태등급
1	2종	동빙고다리	1.연석 균열 25.9m 2.바닥판하면 균열 33m 3.옹벽구간 균열 15.6m 4.받침장치 부식 12개소 5.교각 철근노출 0.48㎡	2015년 조치예정 (일상유지보수)	B등급
2	2종	망원3교	1.바닥판하면 균열 16m 2.교량받침 편기 7개소 3.신축이음 누수 13.2m	2015년 조치예정 (일상유지보수)	B등급
3	2종	망원4교	1.교대,교각 균열 5.2m 2.교량받침 편기 2개소 3.신축이음 누수 9m 4.방호벽 균열 11.3m	2015년 조치예정 (일상유지보수)	B등급
4	2종	반포대교 북단교	1.난간변형,부식 205m 2.신축이음 후타재파손 28㎡ 3.연석 균열 59.9m 4.교대,교각 균열 64.5m	2014년 조치예정 (일상유지보수)	B등급
5	2종	원효로 접속교	난간파손 4m	2014년 공사 중 (일상유지보수)	B등급
6	2종	당인교	1.교면포장 불량 18.9a 2.방호벽 균열 47m	2015년 조치예정 (일상유지보수)	B등급
7	2종	청암교	1.교대,교각 균열 33.2m 2.바닥판하면 균열 11m 3.연석 균열 1.5m	2015년 조치예정 (일상유지보수)	B등급
8	2종	한강대교 동측지하차도	1.벽체 누수 11m 2.교면포장 불량 1.3a	2015년 조치예정 (일상유지보수)	B등급
9	법정외	원효대교 북단교	1.바닥판하면 균열 14m 2.주형,가로보 균열 3m 3.교좌받침 부식 5개소	2015년 조치예정 (일상유지보수)	B등급
10	법정외	서빙고다리	1.교면포장 불량 13a 2.방호벽 균열 47m 3.거더,가로보 균열 33m 4.교좌받침 부식 42개소	2015년 조치예정 (일상유지보수)	B등급
11	법정외	새남터다리	1.바닥판하면 균열 5.4m 2.신축이음 파손 2개소	2015년 조치예정 (일상유지보수)	B등급
12	법정외	봉원교	1.바닥판하면 균열 6.9m 2.교대,교각 균열 4m	2015년 조치예정 (일상유지보수)	B등급
13	법정외	두모교 접속교	1.연석 균열 8.3m 2.바닥판하면 박리 4.3㎡ 3.교대,교각 균열 4.9m	2015년 조치예정 (일상유지보수)	B등급

향후 조치계획

13개 시설물의 부재별 보수대상 중 1순위 보수물량에 대하여 예산범위 내에서 우선순위 보수물량을 산정 금년 자동차전용도로 일상유지보수공사에 포함(작업지시) 보수조치하고 잔여물량에 대하여는 2015년 예산확보하여 보수토록 조치

보고서(각 5부) 작성 및 CD제작 납품

도로시설물 관리시스템 입력 및 시설물 안전관리프로그램(FMS) 연동

점검비 지급

예산배정액 : 450,913천원(시설물 안전점검 및 진단사업비)

- 자체 정밀점검비 : 63,336,140원

- 원천징수 : 2,643,660원(소득세 2,403,390원, 주민세 240,270원)

- 차인지급액 : 60,692,480원

※ 점검비는 소득세 5%공제, 주민세는 소득세의 10%공제후 지급

지급방법 : 외부전문가 개인별 은행계좌로 입금 → e-호조

- 점검비 산출내역 및 지급조서 : 별첨 참조

예산과목 : (도시개발특별회계) 도시안전실, 도로시설과, 도로시설관리,

도로시설물운영, 시설물 안전점검 및 진단, 시설비(205-401-01)

붙임 : 1) 점검비 소요예산 산출내역 1부.

2) 자체 정밀점검 참여자 명단 1부.

3) 점검비 지급조서 1부.

4) 시설물별 손상 및 개략공사비 내역 1부.

5) 종합보고서 각 1부(별도).  끝.