문서번호	토목부-20972
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		최광무	10/29 노우성
협조

부대공 추가반영을 위한 실정보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

부대공 추가반영을 위한 실정보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

강일삼거리 우수암거 공사기간동안 교통전문 신호수를 추가 배치하고 공사에 저촉된 기존 시설물 원상복구 등에 따른 비용을 지급하기 위한 실정보고임.

공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

○ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

○ 공사기간 : 2012. 8. 2 ～ 2014.12.31

○ 도 급 비 : 18,161백만원

○ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

현 황

○ 교통신호수 배치

- 도로공사 신고허가 시 관할 강동경찰서 허가조건인 교통전문 신호수 2~3인 배치 조건으로 승인되어 공사기간동안 실 투입된 인원 반영.

○ 보행자도우미 배치

- 우수암거공사 구간에 각종 지하매설물이 산재되어 있어 불가피하게 계획보다 공사 기간이 추가로 소요 되었으므로 실 투입기간 반영.

구 분	당초 공사일수	실제 공사일수	비 고
공사기간	‘14. 04. 16∼’14. 06. 06	‘14. 04. 24 ~ ’14. 09. 06
공사일수	52일	136일	증 84일

○ 기존 우수암거 보호 차수매트 설치

- 고덕천 기존 우수암거에 설치된 보호 차수매트가 신설 우수암거와 연결하면서 훼손되어 원상복구 필요.

○ 보도와 자전거도로 분리 차선도색

- 보도부에 우수 암거를 시공하였으나 관할청인 강동구와 협의 결과 보도부를 아스콘으로 포장하고 보도와 자전거도로를 구분하여 통행로 조성요청이 있어  차선도색 시행.

◦ 강일삼거리 공사현황

고덕교

고덕차량기지

고

덕

천

선사로확장공사

우수 BOX

L=326m, 1.5×1.5

교통신호수

배치위치

교통신호수

배치위치

고덕천

고덕천 하부

우수암거

산책로

우수 BOX

1.5×1.5

기존 우수암거에 신설암거 연결부

3차공사

1차공사

2차공사

호안블럭 원상복구

(변경없음)

사면보호

콘크리트기초

(추가설치)

감리단 검토의견

○ 교통신호수 및 보행자 도우미는 공사 시 통행차량 안전을 위한 강동경찰서의 허가 조건으로 보행자 안전을 위해 반영함이 타당한 것으로 사료 됨.

○ 배치기간 적용

- 실지 공사시행 기간이 당초 계획 보다 길어 졌으나, 시공사 귀책사유로 판단되므로 당초 계획 공정상의 공사일수(52일)만 반영함이 타당한 것으로 사료 됨.

○ 단가 적용은 실적공사비 가능공종을 우선 적용하고, 신규공종은 표준품셈에   의한 낙찰율 적용

○ 관급자재(레미콘)

- 고덕천 사면 원상복구시 호안블럭 하부에 토사유실을 위한 토목섬유(부직포)만 설계 되어 있으나 관계기관 하천점검시(2014. 5.) 호안보호를 위하여 추가로 콘크리트 기초 설치 요청이 있었으므로 관급자재 반영은 타당한 것으로 사료됨.

조치 계획

○ 상기 감리단 검토의견이 타당하므로 승인하고, 추후 설계변경시 반영코자 함.

- 개략공사비 : 증)25백만원

붙  임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.