투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행(정산) 시행에 따른 변경계약 의뢰

우리 본부에서 추진중인 『2014년 한강 저수로 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행에 따른 변경계약을 의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 한강 저수로 정비공사

나. 계약기간 : 2014. 3.28 ∼ 2014.10.31

다. 계약금액 : 1,549,684,000

라. 시 공 사 : ㈜한라 대표 최병수

마. 감 리 사 : ㈜천일 대표 김석환

바. 변경내용

구 분	금 액			비고 (단위:원)
	당 초	변 경	증·감
도급비	1,549,684,000	1,749,684,000	증) 200,000,000

사. 설계변경사유

- 정산잔액 및 시비 예산절감액을 준설토 사토처리비로 전환사용

아. 예산과목

- 깨끗하고 안전한 한강만들기, 한강하천시설관리, 한강저수로정비, 시설비

(증 200,000,000)

- 치수및하천관리, 하천복원및정비, 국가하천유지보수, 시설비

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부

2. 설계변경 사유서 1부

3. 설계변경 내역서 1부. 끝.

	치수과장
주무관	김동식		치수과장	10/29 代손창열
협조자
시행	치수과-3926	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개