문서번호	기전설비과-7438
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
서기종	서대훈	박용철	10/29 정득모

『암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 정보통신공사』

준공기한 연기 검토보고

2014. 10. 29(수)

상수도 사업본부

(생산부 기전설비과)

작 성 자	생산부장 : 박용철 ☎3146-1301 기전설비과장 : 서대훈☎1330 담당 : 서기종 ☎1337

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 정보통신공사』

준공기한 연기 검토보고

『암사정수장 시설현대화 및 고도정수처리건설 정보통신공사』와 관련 공기연장으로 인한 계약금액조정 신청이 있어 이를 검토하기 위한 기간이 필요하여 준공기한을 하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 정보통신공사

□ 계약업체 : 아이엔씨통신(주)

□ 감 리 사 : ㈜범한엔지니어링종합건축사사무소

□ 계약금액 : 650,800천원

- 연차별 계약현황

(단위:천원)

구 분	총 차	1차	2차	3차	4차	5차(금회)
공사금액	650,800	133,865	64,765	58,813	220,653	172,704
공사기한	‘09.09.09 ~ ‘14.06.30	‘09.09.09 ~ ‘10.12.30	‘11.01.01 ~ ‘12.12.29	‘12.02.01 ~ ‘12.12.27	‘13.05.06 ~ ‘13.12.26	‘14.03.18 ~ ‘14.06.30
비 고		준 공	준 공	준 공	준 공

Ⅱ		연기사유

□ 연기사유

가. 공사계약일반조건 8절-2 계약기간의 연장 가항에 해당           하는 사유가 발생

1). 1-다. 5) 제6절“1” 따른 설계변경으로 인하여 준공기한 안에 계약을         이행할 수 없을 경우

가) 시공회사 아이엔씨통신(주)에서『기타계약내용 변경(공기연장)으로 인한 계약금액 조정 신청』접수되어 검토기간 필요

① 공기연장(668일)에 따른 추가 요청 금액 : 58,722천원(부가세포함)

② 공기연장에 따른 계약금액 변경 가능여부 검토 진행중(토목분야에서 추진중)

법무담당관에 자문요청 : 2014.10.20.

법무담당관에서 외부 변호사(3명) 지정 : 2014.10.23

Ⅲ		조치의견

□ 상기의 내용과 같이 주공정인 토목분야에서“공기연장에 따른 계약금액 조정신청”에 대하여 법률자문을 요청한 상태이고, 도시기반시설본부에서 유사한 사항에 대하여 소송진행중에 있고 2심 소송이 ‘14.11.5. 판결예정으로 2심소송 판결내용을 검토 적용하기 위하여 공사준공기한을 연기하고함.

Ⅳ		공사기한 연기내용

□ 준공기한 연기 : 당초(‘14.10.30)→변경(’14.11.25)

건 명	차수별	계약금액 (천원)	당 초 납품기한	변 경 납품기한	비 고
암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 정보통신공사	총 차	650,800	‘09.10.06 ~ ‘14.10.30	‘09.10.06 ~ ‘14.11.25	26일 증
	1차분	133,865	‘09.09.09 ~ ‘10.12.30	‘09.09.09 ~ ‘10.12.30	준 공
	2차분	64,765	‘11.01.01 ~ ‘12.12.29	‘11.01.01 ~ ‘12.12.29	준 공
	3차분	58,813	‘12.02.01 ~ ‘12.12.27	‘12.02.01 ~ ‘12.12.27	준 공
	4차분	220,653	‘13.05.06 ~ ‘13.12.26	‘13.05.06 ~ ‘13.12.26	준 공
	5차분	172,704	‘14.03.18 ~ ‘14.10.30	‘14.03.18 ~ ‘14.11.25	26일 증

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 암사고도 토목공사 연기방침서 1부.

2. 공기연장에 따른 계약금액 조정신청 1부. 끝.