함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(암수정수장 고도정수처리 전기공사_총차,4차분)

1. 우리 본부에서 시행중인 암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 전기공사의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공  사  명 : 암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 전기공사

나. 귀책소재 및 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 상수도사업본부

- 지체상금 : 미부과

다. 준공기한 연기내용

구분	당 초	변 경	비 고
전체	′09.11.09~ ′14.06.30	′09.10.26~ ′14.11.25	26일증
4차	′14.01.28~ ′14.06.30	′14.01.28~ ′14.11.25	26일증

라. 연기사유 : 공사계약일반조건 8절-2 계약기간의 연장 가항에 해당사유 발생.

마. 공사금액 변경없음.

붙임 : 1) 준공기한 연기검토보고 방침서 1부.

2) 합의서 1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	서기종		기전설비과장	10/29 서대훈
협조자
시행	기전설비과-7440	(		)	접수		(		)
우	120-030	서대문구 서대문로 94 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1337	/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개