의원 요구 자료 제출

시 행	도시철도설비부-9810
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	내부결재

주무관		차량과장	도시철도설비부장	도시철도국장		결재
안봉용		황영일	정찬웅	10/29 김준기
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출 (요구번호 91번, 신언근의원, 교통위원회)

따로붙임 :  시의원 요구자료 1부.  끝.

신언근의원( 교통위원회, 새정치민주연합)

91. 우이~신설 경전철 민간투자사업 관련

1) 도입차량 방식, 제원. 제조사, 예상가격

2) 차량구매를 위한 현재까지의 추진내용과 향후 추진 방식

□ 우이~신설 경전철 민간투자사업 관련 현황은 따로붙임과 같습니다.

따로붙임 : 우이~신설 경전철 민간투자사업 관련  자료 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시기반시설본부)	담당사무관	황영일
	☎ 772-7288	주 무 관	안봉용
	작 성 일 : 2014. 10. 28.

□ 우이~신설 경전철 민간투자사업 관련

1) 도입차량 방식, 제원. 제조사, 예상가격

차량방식	제 원	제조사	협약가격	비 고
경전철(철제차륜) 36량 (2량×18편성)	무인운전 AL 차체 VVVF 인버터 DC 750V	현대로템㈜	601억원 (16.7억원/량) (‘06.1.1.불변가)

2) 차량구매를 위한 현재까지의 추진내용과 향후 추진 방식

○ 현재까지 추진내용

- 2009. 4. : 우이-신설경전철 민간투자사업 실시협약 체결

- 2013. 5. : 시제 차량(Mock up) 제작

- 2013. 8. : 양산차량 제작을 위한 상세설계 완료

- 2013.12. : 차량제작 착수

- 2014. 8. : 차체 36량 제작․도장 완료 (의장작업 진행)

○ 향후 계획

- 2014. 11. : 차량 성능시험(공장)착수.

- 2015.  6. : 첫 편성 차량 반입 및 조성 시험

- 2016. 1. : 본선 차량 성능 시험

- 2016. 6. : 시운전 실시(기술 및 영업).  끝.