투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 - 2014년 한강르네상스호 정기검사 및 수리용역

1. 수상관리과-5224(2014.10.30.)호와 관련입니다.

2. 수상관리과에서 추진중인『2014년 한강르네상스호 정기검사 및 수리용역』건에 대하여 다음과 같이 변경계약하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체	계약금액(원)	계약기간
2014년 한강르네상스호 정기검사 및 수리용역	대한조선(주)	175,532,500	2014.9.30. ~ 10.31.

나. 변경내역                                             (단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	변경사유
계약금액	175,532,500	234,388,000 (증58,855,500)	부분개방검사에서 전체개방검사로 변경
준공기한	2014.10.31.	2014.11.4.	개방검사 추가로 인한 작업일 확보

다. 귀책소재 및 지체상금 부과 여부

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과

붙임 : 변경계약 요청 의뢰서 일체.  끝.

주무관	이재승		총무과장	최대봉		총무부장	전결 10/30 代최대봉
협조자
시행	총무과-16485	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	existwin@seoul.go.kr	/	부분공개