투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 토목시설물 정비공사(하반기-연간단가) 설계변경(1차) 시행

1. 시설과-5265호(2014. 10. 28.)관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『2014년 토목시설물 정비공사(하반기-연간단가)』설계변경(1차)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 토목시설물 정비공사(하반기-연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 8. 14. ~ 2014. 12. 31.

다. 공사개요 : 공원포장도로 소파보수, 배수시설정비, 기타 토목시설정비

라. 계 약 자 : 기웅공영주식회사 대표 전용태

마. 계약금액 : 금68,599,450원

바. 설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총 공 사 비		금90,749,450원	금90,749,450원	-
도급비	공 급 가 액	금62,363,137원	금61,979,091원	(감)384,046
	부가가치세	금6,236,313원	금6,197,909원	(감)38,404
	계	금68,599,450원	금68,177,000원	(감)422,450
관 급 비		금13,594,000원	금13,753,000원	(증)159,000
폐기물처리비		금3,383,000원	금3,383,000원	-
이 설 비		금5,173,000원	금5,436,450원	(증)263,450

사. 예산과목

○세계적인 환경·생태 테마공원 육성, 공원·녹지관리 수준향상, 산하공원운영, 선유도공원 유지관리, 시설비(100-401-01)

사. 변경사유 : 공사물량 변경 및 신규공종 발생

첨 부 : 1. 설계변경 계획 검토 보고(방침서) 1부

2. 설계서(변경1차) 1부

3. 제비율검증 1부.  끝.

주무관	이석중		주무관	오재영		시설과장	한성현		서부공원녹지사업소장	10/30 안해칠
협조자	공원운영과장	조준수
시행	시설과-5308	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 월드컵로 243-60(성산동 390-1)	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		/전송	300-5569	/		/	대시민공개