문서번호	대응관리과-8402
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	대응총괄팀장	대응관리과장		소방서장
박범철	이승교	정원배		10/30 최정현
협 조

2014. 저수조 안전진단 기술용역 추진 계획

강 북 소 방 서

( 대 응 총 괄 팀 )

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014. 저수조 안전진단 추진 계획

시설물의 물리적ㆍ기능적 결함을 발견하고 그에 대한 적절한 조치를 취하고 저수조의 안전성을 확보하고자 안전진단용역을 추진하고 함

Ⅰ	저수조 개요

대    상 : 저수조 2개소

현    황

연번	시설물명	위치	시설개요	구 조	준공 년도
1	3003호	강북구 도봉로 41-1 (미아동 58)	3.0m× 6.95m× 높이2m =41.7㎥ 저수위1.5m(40톤)	철근 콘크리트	1976
2	3006호	강북구 오패산로30길 22 (미아동 98-37)	3.3m× 6.1m× 높이2m =40.2㎥ 저수위1.5m(40톤)	철근 콘크리트	1976

Ⅱ	용역개요

용 역 명 : 저수조 안전진단 용역

과업대상 : 저수조 2개소

용역기간 : 착수일로부터 30일

시행방법 : 기술용역으로 시행

배정예산 : 금4,000,000원(금사백만원)

- 예산과목 : 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축/소방용수시설등의                   설치 및 관리/일반회계/소방용수시설 보수/40101-시설비

발주방법 : 수의계약

Ⅱ	과업내용

과업목적

- 본 용역은 「시설물의안전관리에관한특별법」 제7조 및 동법 시행령 제9조의 규정에         의한 저수조 시설물의 정밀진단 과업으로서, 시설물의 물리적․기능적 결함을 발견         하고 그에 대한 적절한 조치를 취하기 위하여 구조적 안전성 및 결함원인 등을          조사․측정․평가하고 적절한 보수․보강방안을 제시, 시설물의 안전성을 도모함

과업내용

(1) 시설물 관련도서 검토 및 계획수립

(2) 기 실시한 점검 및 진단에 따른 보수이력 확인

(3) 현장조사 및 시험

- 차량통제, 준설작업, 펌핑작업, 세척작업, 구조물 제원조사, 구조물 손상조사,           내구성조사(콘크리트 강도, 철근배근탐사 등)

- 구조물의 누수 여부 확인 철저

(4) 성과품 작성

- 실측도면작성, 손상도 작성, 보수보강방안 작성

(5) 보고서 작성

- 시설물별 조사결과 분석, 상태평가, 안전성평가(구조해석)

- 보수보강방안 및 유지관리방안 제시, 종합평가

(6) 성과품 제출

- 실측도면, 손상현황도, 보수 ․ 보강도면, 보고서(부록포함)

- 사진첩, CD-ROM

Ⅱ	추진일정

기술용역 타당성 심사요청 : 2014. 10월

저수조 안전진단 계획 수립 : 2014. 11월

용역발주 및 계약 : 2014. 11월

용역수행 : 2014. 11월