투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	(주)유신
(경유)
제 목	설계변경(정산) 계약요청(디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계)

1. 귀사에서 우리본부와 계약체결 시행중인「 디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계 용역」에 대한 정산결과 계약금액이 변경(감)되어 아래와 같이 변경 계약요청하오니 계약업무 절차를 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계용역

나. 계약금액 : 793,933,000원

다. 계약자 : ㈜유신 대표  박찬식외 2개사

라. 계약기간 : 2013. 5.24. ~ 2014.10.31.

마. 설계변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비고
계약금액	793,933,000	785,420,000	(감)8,513,000
용역기간	2013. 5.24.~2014.10.31.	2013. 5.24.~2014.10.31.

붙  임 : 변경내역서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이석근		토목설계과장	조성만		토목부장	10/30 노우성
협조자
시행	토목부-21142	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울특별시청 서소문별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개