문서번호	물관리정책과-16401
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물재이용관리팀장	물관리정책과장		물관리정책관
이두환	이웅희	배광환		10/30 代배광환
협 조

『산골마을』주거환경관리 사업지구 빗물관리 시설 설치비 지원계획 보고

2014. 10.

도시안전실

물관리정책과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 ■
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	은평구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

산골마을 주거환경관리 사업 지구

빗물관리시설 설치비 지원계획 보고

주민 참여형 재생사업과 연계 물순환을 고려한 빗물마을 조성사업과 관련 은평구 산골마을에 대한 시설 설치비를 지원하고자 함

1		관련근거

□ 건강한 물순환 도시 조성 종합계획 (시장방침 제272호, ‘13.10.7)

- 5. 시민과함께하는 건강한 물순환 도시 [5-1. 빗물관리 시범마을 조성]

2		산골마을 주거환경개선사업 개요

□ 사 업 명 : 은평구 산골마을 주거환경관리사업

□ 대 상 지 : 은평구 응암동 31번지, 녹번동 71번지 일대

□ 구역면적 : 13,896㎡

□ 지역/지구 : 제2종(7층이하), 제2종, 제3종 일반주거지역

□ 위치도

3		그간 추진경위

□ ’13.10.7	건강한물순환도시 종합계획 수립(시장방침272호)

- 마을만들기와 연계한 빗물마을 조성

· 주민참여형 재생사업(주거환경관리사업)과 연계추진

· 도로·녹지·주민 커뮤니티 공간 등 계획시 물순환고려

- 사업계획 등 초기단계부터 협의하여 ‘15년 이후 확대

□ ’13.10.22  산골마을 주거환경개선사업 공람공고 협의회신

□ ’14.6.20	물순환시설 설치관련 전문가 자문회의 개최

- 도로정비, 그린존, 계단정비, 오픈space 등의 계획시 빗물을 소량이라도 머금고 침투시킬수 있도록 재검토 필요 등 11건 검토의견 제시

□ ’14.7.22	은평구 조치계획서 제출

□ ’14.10.13	산골마을 물순환시설 설치 조치결과 검토회의 개최

4		물순환 시설설치 계획

□ 응암동 · 녹번동 지역

□ 설치개요

- 투수성포장(인조화강석 블록포장) 438㎡

- 빗물유입 화단조성  350㎡

- 자갈포장  8㎡

□ 소요예산 : 50,000천원

□ 검토 의견

- 본 대상구간은 통일로상 은평구와 서대구문구의 경계 위치하여 있으며 경사가 심하고 암반 등으로 인하여 다수의 물순환시설 설치가 곤란하나, 설치가능한 시설을 최대한 설치하도록 지원하고자 함

- 자치구(은평구)에서 설계된 물순환 시설설치 비용을 지원하여 금년내 공사가 착공 가능하도록 사업비 재배정

5		향후계획

□ ‘14. 10    산골마을 물순환시설 설치비 재배정

- 예산과목 : 도시안전실 물관리정책과, 깨끗한물관리, 물환경개선관리, 빗물관리시설 확충, 시설비(100-401-01)

□ ‘14. 11~  공사계약 및 착수 (은평구). 끝.