문서번호	방재시설부-10993
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이정국		서관석	10/30 임춘근
협조

『신림2 빗물펌프장 설치공사 전면책임감리용역』

설계변경(전체 2회, 1차 2회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

도시기반시설본부

방재시설부

『신림2 빗물펌프장 설치공사 전면책임감리용역』

설계변경(전체 2회, 1차 2회) 검토보고

공사기간 연장에 따른 감리비 부족 및 조경분야 감리 미투입에 따른 감리원 배치(기계, 전기, 건축) 조정 및 용역기간 조정 등에 대한 검토 보고임.

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 신림2 빗물펌프장 설치공사 전면책임감리용역

□ 감 리 사 : ㈜도화, ㈜제일

□ 용역기간 : 전체 - 2013. 04. 01 ~ 2014. 12. 31

1 차 - 2013. 04. 01 ~ 2014. 11. 02

※ 공사기간 : 2013. 01. 04 ~ 2014. 12. 15

□ 계약금액 : 전체 – 976,000천원

1 차 – 827,900천원

□ 검토내용

1) 설계변경 내용

□ 조경 감리원 미투입(축소)

- 공사기간 연장에 따른 감리예산 부족 및 조경부분 시공물량 감소(전체 약 50%) 등에 따라 조경감리 부분은 기술지원감리원(조경분야) 및 현장 상주 감리원으로 대체

□ 감리용역기간 및 배치계획 변경

- 조경 감리 부분 미투입(축소)에 따른 감리용역기간 및 감리원 투입 조정

- 투입 일정에 따라 전기, 건축 감리원 투입시기 조정

2) 설계변경 현황

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감
용역 금액	전체	976,000	976,000	변경없음
	1 차	827,900	827,900	“
용역 기간	전체	′13.04.01 ∼ ′14.12.31	′13.04.01 ∼ ′15.01.20	증 20일
	1 차	′13.04.01 ∼ ′14.11.02	′13.04.01 ∼ ′14.11.06	증 4일

※ 2차 감리 발주 계획

- 용역금액 : 148,100천원

- 용역기간 : ‘14.11.07 ~ ’15.01.20

☞ 2015년 예산 사용

□ 검토의견

□ 상기와 같이 조경 감리 부분 미투입(축소) 등에 따른 감리용역기간 조정 및 배치계획 조정 등은 적정하므로 설계변경하여 안전 및 품질관리 등 공사관리에 만전을 기하고자 하며,

□ 현재 미발주 감리 2차분는 ‘14년 예산부족에 따른 공사기간 연장계획(’14.12.15→‘15.2.28)에 따라 ‘15년 예산(148백만원) 범위내에서 발주코자 함.

붙임 : 1. 감리검토 의견서 1 부.

2. 감리투입 계획서 1 부.

3. 변경내역서(전체 2회, 1차 2회) 1 부. 끝.